투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	제4회 설계변경(정산) 시행(2014년 불량맨홀 정비공사)

우리 사업소에서 시행중인 불량맨홀 정비공사(연간단가)에 대한 설계변경(정산)을 아래와 같이 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 2014년 관내 포장도로 불량맨홀 정비공사(연간단가)

나. 공사기간 : ‘14.06.10 ~ ‘15.02.28

다. 공사개요 : 맨홀정비 679개소(주간 258개소, 야간 421개소)

라. 도 급 자 : 거대이엔지(주) 대표이사 김창진

마. 변경사유 : 작업여건 변경에 따른 단순물량 증.감

바. 변경 내역                                            (단위:  원)

구 분		당 초	변 경	증, 감	비 고
도급비	공급가액	541,818,182	541,818,182	-
	부가세	54,181,818	54,181,818	-
	계	596,000,000	596,000,000	-

사. 예산과목  :  도로시설물관리, 도로및도로부속물관리(도시개발), 노후포장도로정비공사,시설비및부대비, 시설비

따로붙임 : 1. 방침서 1부

2. 설계변경 내역서 1부

3. 제비율 검증서 1부  끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
주무관	윤옥진		도로보수과장	김권일		강서도로사업소장	02/09 조병준
협조자	관리단속과장	이은엽		계약1팀장	김점선
시행	도로보수과-1332	(		)	접수		(		)
우	157-210	서울 강서구 양천길(마곡동67-1)	/
전화	02-2657-7954	/전송	02-2657-7960	/	jm0756@seoul.go.kr	/	대시민공개