문서번호	토목부-2573
결재일자	2015.2.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관	광역도로과장	토목부장
박상철	진재섭	02/09 노우성

건설폐기물 처리용역 설계변경 보고

(율곡로 창경궁앞 도로구조개선공사)

2015. 2.

서울특별시도시기반시설본부

(토 목 부)

- 율곡로 창경궁앞 도로구조개선공사 -

건설폐기물 처리용역 설계변경 보고(2차3회)

『율곡로 창경궁앞 도로구조개선공사』건설폐기물 처리용역에 대하여 시설공사 설계변경에 따라 실처리한 처리물량으로 설계변경을 시행코자 함

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 율곡로 창경궁앞 도로구조개선공사 건설폐기물처리용역

○ 용역개요 : 건설폐기물 운반 및 처리 1식

○ 용역금액 : 150백만원

○ 용역기간 : ‘13. 3. 1. ~ ’15. 2.28.

○ 용역업체 : (주)장형기업

□ 설계변경 현황

○ 설계변경 사유

- 시설공사 설계변경에 따른 물량조정

○ 설계변경 내역 : 설계서 별첨

- 2차분(제3회 변경)

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증․감	비 고
도급액	150,000,000	19,712,000	감)130,288,000

○ 용역기간 : 변경없음

□ 조치의견

○ 시설공사 진행상태를 감안하여 건설폐기물 처리용역을 설계변경
시행함이 타당함.

붙임 : 설계변경 내역서(2차3회) 1부.  끝.