문서번호	기전과-1308
결재일자	2015.2.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		기전과장
박정민		02/10 이영목
협 조
	주무관		백윤광

『2014년 교통신호기 신설 및 보수공사(연간-2구역) 제5차 작업지시』

현장실정보고 검토 및 조치계획 보고

2015. 2.

북부도로사업소

(기 전 과)

『2014년 교통신호기 신설 및 보수공사(연간-2구역) 제5차 작업지시』

현장실정보고 검토 및 조치계획 보고

교통신호기 신설 및 보수공사(연간-2구역) 제5차 작업 추진중 책임감리사(영호이앤씨)로부터 현장실정에 따른 기술검토의견서가 접수되어 이를 검토하고 조치계획을 보고함

□ 관련근거

○ 2015. 2. 2. 교통신호기 신설 및 보수공사(연간-2구역) 제5차 작업지시

○ 2015. 2. 9. 북부2구역 5차 작업지시 실정보고서 제출(영호이앤씨)

□ 공사 개요

○ 공 사 명 : 2014년 교통신호기 신설 및 보수공사(연간-2구역)

○ 공사기간 : 2014. 04. 11. ~ 2015. 02. 28.

○ 시공업체 : ㈜세진종합이엔씨 대표 이성임

○ 계약금액 : 금696,608천원

□ 제5차 작업지시 내용

○ 작업기간 : 2015. 2. 2. ~ 2015. 2. 11.

○ 작업대상 : 노원구 월릉교 외 11개소

○ 작업금액 : 금46,736천원

연번	교차로명	현황 및 문제점	감리사 검토의견	비고 (개략)
1	월릉교	○ 현장확인결과 음향신호기 압버튼 교체구간 2EA → 1EA가 양호	○ 음향신호기 압버튼 1EA 교체 삭제	감 284
2	음향신호기 기능검사비	○ 월릉교교차로의 원인자 공사구간으로 시공사에서 음향신호기 기능검사비용을 대납한 상태로 검사비 제외함	○ 음향신호기 2대분 기능검사비 삭제	감 77
3	간접비	○ 직접재료비, 직접노무비, 음향신호기 기능검사비의 정산에 따른 간접비 차액 발생	○ 간접비 정산	감 86
합 계			감 448

□ 감리사 현장실정보고 내용 및 검토의견               (단위:천원)

□ 작업지시 변경금액                                (단위:원)

구분	변경 전	변경 후	증 ․ 감	비고
공급가액	42,487,273	42,080,000	407,273
부가가치세	4,248,727	4,208,000	40,727
합 계	46,736,000	46,288,000	448,000

□ 보고자 의견

○ 책임감리사(영호이앤씨)로부터 접수된 현장실정보고에 대해 검토한 결과 현장여건에 맞게 변경하여 위와 같이 시공토록 승인하고 작업을 추진토록 하고자 함

붙 임 :  제5차 감리사 현장실정보고 1부.  끝.