문서번호	교량안전과-2012
결재일자	2015.2.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		특수교량팀장	교량안전과장
우창원		이수근	02/10 代하현석
협조

『2014년 한강교량 일상유지보수공사(연간단가)-서부 설계변경 검토보고』

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 02.

교량안전과

『2014년 한강교량 일상유지보수공사(연간단가)-서부』

설계변경 검토보고

우리 사업소와 도급계약을 체결하고 시행중인 『2014년 한강교량 일상유지보수공사(연간단가)-서부』 추진중 책임감리원으로 부터 설계변경(3차) 보고가 있어 이에 대한 검토 보고사항임.

공사개요

공 사 명 : 2014년 한강교량 일상유지보수공사(연간단가)-서부

공사기간 : 2014.04.09 ~ 2015.02.28

공사개요 : 교면포장 및 방수, 신축이음 보수, 균열보수, 단면보수 등

계약금액 : ￦1,145,626,310원

시 공 사 : ㈜케이디엠건설 대표 강영숙

감    리 : ㈜대한콘설턴트, (주)신명건설기술공사

감리 실정보고 내용(대한감본 15-39호)

변경공사비

구 분		공 사 금 액			공사기간	비 고
		당 초	변 경	증․감
전체사업	도 급 비	1,145,626,310	1,145,626,310		2014.04.09 ～ 2015.2.28	내역 (물량) 변경
	관 급 비	5,973,690	5,973,690
	이 전 비	5,400,000	866,000	감)4,534,000
	계	1,157,000,000	1,152,466,000	감)4,534,000

설계변경 사유

· 긴급출동 및 응급복구 수량 증가 반영

· 제경비 정산

검토의견

제반 설계도서를 검토한 바, 단가 및 수량이 적정하게 산출된 것으로 판단되어 책임감리원 보고내용과 같이 설계변경 시행코자 함.

첨 부 : 1. 책임감리원 설계변경 보고 1부.

2. 설계변경내역서 1부.  끝.