투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	영등포소방서 담장개방 및 녹화사업 관급자재 납품기한 연기 요청

1. 시설과-606(2014.2.9.)호와 관련입니다.

2.『영등포소방서 담장개방 및 녹화사업』에 소요되는 관급자재에 대하여 다음과 같이 납품기한 연기를 요청합니다.

가. 납품기한 연기내용

물품식별번호	품 명	계약자	납 품 기 한		비고
			당 초	변 경
22415350	안내판 (NZ/KY-40-2)설명해설판	오성씨앤디	2015.2.28	2015.5.31
22415400	안내판 (NZ/KY-75-1)설명안내판
22320276	퍼걸러 (HJ-352E)	형진랜드	2015.3.1

나. 변경사유 : 본공사(조경공사) 준공기한 연기에 따른 관급자재 납품기한 연기.

붙   임 : 납품기한 연기 의뢰서 1부.  끝.

	시설과장
주무관	임은영		토목시설팀장	윤학수		시설과장	02/10 임병국
협조자
시행	시설과-621	(		)	접수		(		)
우	121-850	서울 마포구 성산2동 341~450	/	http://worldcuppark.seoul.go.kr
전화	02)300-5536	/전송	02)300-5569	/	eylim@seoul.go.kr	/	대시민공개