문서번호	시설보수과-521
결재일자	2015.2.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	성동도로사업소장
임승민		박춘배	전결 02/10 이종엽
협 조
	주무관			이경수
	주무관			김형섭
	주무관			최태석

2015년 도로시설물 안전 및 유지관리계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 2.

성동도로사업소

【시설보수과】

2015년 도로시설물 안전 및 유지관리계획

○ 우리사업소에서 유지관리중인 도로시설물에 대하여     □‘15년 도로시설물 안전 및 유지관리계획□을 수립‧시행

○ 각종 재난을 미연에 예방하고, 시설물의 효용성 증진과 공공의     안전을 확보하여 시민의 복리증진에 기여

Ⅰ		관 련 규 정

법적근거

○ 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제4조, 영 제5조

○ 서울특별시 도로 등 주요시설물 관리에 관한 조례 제6조

계획의 수립 ‧ 제출

○ 시설물의『안전 및 유지관리계획』을 수립‧시행하고 시장에게 제출

○ 2종이상 시설물의 관리계획 및 실적은 한국시설안전기술공단의        시설물정보관리종합시스템(http://fms.or.kr) 및 도로관리시스템 입력

Ⅱ		시설물 현황

관리시설물 현황

구 분	합 계	한강교량	일반교량	고가	입체교차	언더패스	터널	지하차도	복개
계	47(3)		23(1)	8			3	12	1(2)
1종	1(2)								1(2)
2종	16		6	2			3	5
법정외	30(1)		17(1)	6				7

※ 1) 청계천복개(좌,우안) : 통계상 북부,서부도로사업소에 등록

⇒ 성동도로사업소는 관내지역(연장 1.4km, 황학교~고산자교) 시설부분만 관리

2) 기존 관리외 시설 : 마장교(가칭)〈‘15년 정밀점검시 제원정리하여 통계 반영〉

3) 교량 및 고가(1종) 6개시설물 유지관리부서 변경

⇒ 대상시설물 : 워커힐고가, 이화교, 성북천교, 비우당교, 응봉교, 용비교

당초 : 성동도로사업소 시설보수과

변경 : 서울특별시 도시안전본부 교량안전과

Ⅲ		‵14년 유지관리 실적

‵14년 안전점검 실적(1종 교량 및 고가 6개소 인계시설물 포함)

○ 정기점검 실적

구 분	점 검 횟 수			지적건수	조 치 현 황			비고
	계획횟수	실시횟수	비율(%)		조 치 완 료
					계	완료	미조치
계	172	258	150	190	190	180	10
상반기	86	144	167	109	109	109	-
하반기	86	114	132	81	81	71	10	‵15 조치계획

○ 정밀점검 실적

종 별	점 검 시설수	일반교량			고가차도			터 널		지하차도		복개
		1종	2종	법외	1종	2종	법외	2종	법외	2종	법외	1종
계	23		3	3	1	1	3	2		5	5
정밀안전진단	-
정 밀 점 검	-
자체정밀점검	23		3	3	1	1	3	2		5	5

【 자체정밀점검 결과 】

점 검 명	시설수	시설명	용역비 (천원)	점검기간	상태등급 결 과	비 고
워커힐고가 등 23개 도로시설물 자체정밀점검	23	워커힐고가 제2마장교 옥수터널 서울숲1지하차도 서울숲2지하차도 응봉지하차도 장안교(구교) 장안교(신교) 금호터널 용마고가 능산지하차도 면목교 중랑교지하차도 신내교 청량제2고가 답십리지하차도 신내지하차도 신답지하차도 동일로지하차도 군자교동측지하차도 영동대교북단고가 먹골교 뚝섬고가	143,826	2014. 4. 1 ~ 8. 30	B등급:22 C등급: 1	- 외부전문가 합동점검 - C등급 :장안교(구) ⇒ 공사중

‵14년 보수‧보강공사                                   (단위:백만원)

사 업 명	사 업 개 요	사 업 기 간	사업비	비 고
계			9,927
이문고가 보수.보강공사	외부강선 보강 및 보수 12개소 교좌장치 교체 80개소 단면 및 표면 보수 16,561㎡ 등	‘14.03. ~’14.07.	1,400	공사 완료
중랑교 보수.보강공사	교면포장 30a 신축이음 교체 200m 슬래브(신.구교) 강결 134m 등	‘14.03. ~’14.12.	2,350	공사 완료
전농교 보수.보강공사	슬래브하면 보강재 2,205m 강재 전단키 설치 42개소 신축이음 교체 84m 등	‘14.03. ~’14.07.	900	공사 완료
시조사삼거리 교차로구간 개선공사	- 왕산로 차로확장, 육교철거 망우로 차로확장, 고가개선	‘14.12. ~’15.12.	1,800	공사 진행중 (장기계속공사)
청계천복개구조물 보수공사	단면 및 표면보수 1,950㎡ 균열보수 500m, 교면포장 10a 등	‘14.03. ~’14.12.	300	공사 완료
옥수·금호터널 보도 차단벽 설치공사	- 보도 차단벽 설치 970m 터널 2개소(옥수, 금호)	‘14.12. ~’15.12.	1,500	공사 진행중 (장기계속공사)
교량 및 고가차도 일상유지보수공사	- 일반교량 27개소, - 고가차도 9개소	‘14.03. ~’15.02.	694	공사 진행중
터널,복개 및 지하차도 일상유지보수공사	- 터널 3개소, 지하차도 11개소 - 복개구조물 3개소	‘14.03. ~’15.02.	720	공사 진행중
도로시설물 세척용역	- 일반교량 7개소,고가차도 1개소, 터널 2개소, 지하차도 9개소	‘14.03. ~’14.12.	113	공사 완료
(실시설계용역)			150
청량제1고가 성능개선 실시설계용역	- 성능개선 실시설계 1식 B=30m, L=28m	‘14.03. ~’14.12.	100	용역 완료
옥수·금호터널 보도 차단벽 실시설계용역	- 보도 차단벽 실시설계 1식 터널 2개소(옥수, 금호)	‘14.03. ~’14.11.	50	용역 완료

시설물별 유지관리(안전점검 및 보수,보강) 실적 : ″ 별첨 2 ″

Ⅳ		‵15년 안전 및 유지관리계획

조직 ‧ 인원 및 장비 확보 현황

○ 조 직 도

					성동도로사업소 (소 장)
					시설보수과장 (점검총괄)
	김형섭, 최태석								이경수, 임승민

○ 유지관리 인원

- 점검인원      : 5명(과장 1명, 점검직원 4명)

- 직영 보수인원 : 5명(직원 1명, 공무직 4명)

○ 장비 확보 현황

장 비 명	규 격	단 위	수 량	비 고
고소작업차	-	대	1
균열확대경	no2028	개	3
균열게이지	w9193	개	8
콘크리트테스트헤머	NSR형	대	1
쌍 안 경	7×50, 15×32	개	3
안전벨트	-	조	4
점검망치	암석용	개	8

긴급상황 발생시 조치 체계

○ 주간 조치 체계

긴급상황발생

(신고접수)

시설보수과

2210-1551~9

시    장

(도시안전본부장)

유관기관

(경찰서,소방서 등)

긴급상황 지휘

소    장

(현장총괄:시설보수과장)

○ 야간 조치 체계

긴급상황발생

(신고접수)

당직실

2210-1500

시청 상황실

유관기관

(경찰서,소방서 등)

긴급상황 지휘

소    장

(현장총괄:시설보수과장)

※ 도로시설물 관련사고『긴급복구매뉴얼』 참조  ‶ 별첨 4 ‶

시설물 안전점검 및 보수 ‧ 보강 계획

○ 시설물 안전점검 실시 계획

구분	대상시설물 수				시 행 주 기	시행방식	비고
	계	1종	2종	법정외
정기점검	50	3	16	31	반기별1회	자체직원 2인1조
정밀점검	28	1	8	19	A등급 : 3년에 1회 B,C등급 : 2년에 1회	용역	성동교(신,구)1개소로 계상
자체정밀점검	0	0	0	0		자체직원 + 외부전문가
정밀안전진단	1	1	0	0	A등급 : 6년에 1회 B,C등급 : 5년에 1회	용역

※ 청계천복개(좌,우안) 2개소, 마장교(가칭) 포함

○ 정기점검 : 시설물별 세부시행계획 별도 수립

- 상반기 점검 : ‵14. 3. 1 ~  6. 30

- 하반기 점검 : ‵14. 9. 1 ~ 12. 31

○ 정밀점검 및 진단

연번	용 역 명	대상시설 개 소	대상시설	예산액	담당자	비고
계		30		894,673
1	청계천복개도로(좌안) 정밀안전진단검용역	1	청계천복개구조물(좌안)	319,167	이경수	정밀안전진단
2	무지개터널등 3개소 하자만료 정밀점검용역	3	무지개터널,서울숲1지하차도 서울숲2지하차도	38,416	최태석	하자만료 정밀점검
3	면목천복개구조물 등 3개소 정밀점검용역	3	면목천복개구조물, 서울숲 다리교, 신답고가	102,900	최태석	정밀점검
4	이문고가등 4개소 정밀점검용역	4	이문고가, 청량제1고가 안암교, 종암교	83,732	최태석	정밀점검
5	고산자교등 5개소 정밀점검용역	5	고산자교, 무학교, 정릉천교 황학교, 두물다리(청)	71,996	김형섭	정밀점검
6	행당고가등 3개소 정밀점검용역	3	행당고가, 성동지하차도 마장교(가칭)	66,605	김형섭	정밀점검
7	군자교등 5개소 정밀점검용역	5	군자교, 성동교(신,구) 장평교, 전농교	101,311	이경수	정밀점검
8	중랑교등 3개소 정밀점검용역	3	중랑교, 동진교, 용두4교	56,457	임승민	정밀점검
9	용두교등 3개소 정밀점검용역	3	용두교, 제1제기교, 제2제기교	54,089	임승민	정밀점검

※ 안전점검(정밀점검) 주기표 : ‶ 별표 3 ‶

○ ‵15년 시설물 보수 ‧ 보강 계획                     (단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 개 요	사 업 기 간	예산액	비고
계			5,927 (3,300)
면목천 복개구조물 포장 및 보수공사	아스콘 포장 130a 단면보수 96㎡ 등	‘15.03.~’15.08.	1,025
시조사 삼거리 교차로 구간 개선(청량제1고가 성능개선 포함)	왕산로 1개 차로 추가 178m (육교철거 1개소 포함) 망우로 1개 차로 추가 128m (청량1고가 성능개선 포함)	‘15.01.~’15.12. (‘14.12.~’15.12.)	2,980 (1,800)	장기계속
옥수·금호터널 보도 차단벽 설치공사	- 보도 차단벽 설치 960m 터널 2개소(옥수, 금호)	‘15.01.~’15.12. (‘14.12.~’15.12)	0 (1,500)	장기계속
터널 및 복개,지하차도 일상유지보수공사	- 지하차도 12개소, 터널 3개소, 복개구조물 3개소	‘15.03.~’15.12.	530
교량 및 고가차도 일상유지보수공사	- 일반교량 23개소, 고가차도 8개소	‘15.03.~’15.12.	1,180
도로시설물 세척용역	- 일반교량 6개소, 터널 3개소, 지하차도 8개소	‘15.03.~’15.12.	212

○ ‵15년 시설물별 유지관리(안전점검 및 보수,보강) 계획 : ″ 별첨 2 ″

시설물 설계도서 수집 ‧ 보존 현황

○ 유지관리 설계도서 보존 현황

시설물별	종별	대 상 시설물수	보관중인 설계도서
			설계도	구조 계산서	시방서	내역서	감리 보고서	점검․,진단 보고서	시설물 관리대장	기타
계		50	49	18	0	0	0	49	49
교량	1종
	2종	6	6	3				6	6
	법외	18	17	8				17	17
고가차도	1종
	2종	2	2	1				2	2
	법외	6	6	3				6	6
지하차도	2종	5	5					5	5
	법외	7	7	2				7	7
터 널	2종	3	3					3	3
복개구조물	1종	3	3	1				3	3

첨부  1. 유지관리 도로시설물 목록 1부.

2. 시설물별 유지관리 실적 및 계획 1부.

3. 안전점점 주기표 1부.

4. 도로시설물 관련사고 『긴급복구 매뉴얼』 1부.  끝.