921공구 책임감리용역(5차4회) 기성검사(감독)조서

문서번호	도시철도토목부-1810
수 신 자	건설총괄부장
접수번호

결재	주무관		토목3과장		도시철도토목부장
		김소연		김상우		02/10 한동근
협조

용 역 명	서울지하철9호선3단계 921공구 건설공사 전면책임감리용역(5차)
계 약 자	㈜ 유 신 대표이사 박찬식
계약금액	일금 칠억육천팔백구십삼만구천원정(￦768,939,000)				기성금액		일금 일억칠천구백구십삼만구천원정(￦179,939,000)
계약일자	2014년 04월 02일				착수일자		2014년 04월 02일
준공기한	2015년 03월 18일				부 분 기성일자		‘14년 11월 4일 ~ ‘15년 2월 2일
기성검사일자	2015년 02월 10일
참고사항	0.전회까지 기성금액 : ￦399,000,000원(기성율 52.5%) ※도시철도 특별회계￦171,000,000원 0.금 회 기성금액 : ￦179,939,000원(기성율 23.4%) 일반회계 ￦8,939,000원 0.누 계 금 액 : ￦578,939,000원(기성율 75.9%)
위 용역에 대한 감독 및 기성준공검사를 마쳤는 바 설계서와 과업지시서 기타 계약조건의 내용과 같이 완료되었기에 본 조서를 제출함.
2015년 02월 10일
현장감독공무원		도시철도토목부	부	시설6급		직		성명	정성환		정성환
검 사 자		도시철도토목부	부	시설6급		직		성명	김현근		김현근
검 사 자		도시철도토목부	부	시설6급		직		성명	신 정		신정
서울특별시도시기반시설본부(분임)경리관 귀하

기성 검사 조서(5차 4회)

1. 용 역 명 : 서울지하철9호선3단계 921공구 건설공사 전면책임감리용역(5차)

2. 도 급 자 : ㈜유 신   대표  박 찬 식

3. 도 급 액 : 금768,939,000원(금칠억육천팔백구십삼만구천원정)

4. 기 성 금 액

- 전 회 기 성 : 금399,000,000원(52.50%)

- 금회(4회)기성 : 금179,939,000원(23.40%)

- 누  계  기  성 : 금578,939,000원(75.90%)

- 내               역 -

공 종	수량	단위	계약금액	기 성 고(%)			준 공(기성) 금 액			비고
				전회	금회	누계	전 회	금 회	누 계
1.916공구 책임감리용역			639,268,547	52.36	22.44	74.80	334,770,087	143,475,677	478,245,764
1.1 직접인건비	1	식	331,120,439	51.95	22.27	74.22	172,020,967	73,724,627	245,745,594
1.2 제 경 비	1	식	217,678,576	51.95	22.27	74.22	113,086,581	48,466,569	161,553,150
1.3 기 술 료	1	식	54,879,901	51.95	22.27	74.22	28,510,753	12,219,119	40,729,872
1.4 직접경비	1	식	27,189,901	59.78	25.62	85.40	16,251,786	6,965,362	23,217,148
1.5 인 쇄 비	1	식	8,400,000	58.34	25.00	83.34	4,900,000	2,100,000	7,000,000
소 계			639,268,547	52.36	22.44	74.80	334,770,087	143,475,677	478,245,764
공급가액(적용)			636,805,091	52.50	22.50	75.00	334,365,273	143,298,545	477,663,818
2. 물가변동			54,104,000	52.43	22.47	74.90	28,362,000	12,156,000	40,518,000
1) 1회(5.08%)			31,922,000	52.43	22.47	74.90	16,734,000	7,172,000	23,906,000
2) 2회(3.53%)			22,182,000	52.43	22.47	74.90	11,628,000	4,984,000	16,612,000
3.손해배상보증수수료			0	0.00	0.00	0.00	0	0	0
4.계측전담감리	1	식	8,126,364	0.00	100.00	100.00	0	8,126,364	8,126,364
계	1	식	699,035,455	52.50	23.40	75.90	362,727,273	163,580,909	526,308,182
3.부가가치세			69,903,545	52.50	23.40	75.90	36,272,727	16,358,091	52,630,818
총 용 역 비			768,939,000	52.50	23.40	75.90	399,000,000	179,939,000	578,939,000

끝.