문서번호	설비부-1770
결재일자	2015.2.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	환경설비과장	설비부장
김현욱	유병기	02/10 박기형

「남부순환로(개봉역 앞)구조개선 전기공사」

설계변경(4차-7회)검토보고

2015. 02.

「남부순환로(개봉역 앞)구조개선 전기공사」

설계변경(4차-7회)검토보고

우리 본부에서 시행 중인『남부순환로(개봉역 앞)구조개선 전기공사』와 관련 책임감리원으로 부터 「실정보고에 따른 금액증감 및 물가변동으로 인한 계약금액조정(ESC) 정산」사항에 대하여 아래와 같이 검토 보고함.

관련근거

❍ 동기공2015-0459호(2015.02.10.), 설계변경도서 제출(총괄7회, 4차7회)

공사개요

❍ 공 사 명 : 남부순환로(개봉역 앞) 구조개선 전기공사(4차)

❍ 위    치 : 구로구 개봉동 198-1번지 남부순환로(개봉역 앞)

❍ 공사기간 : 2009. 8. 3.~2015. 7. 31.(4차:‘13. 8. 3~’15. 7. 31)

❍ 계약금액 : 총차 1,267,643,400(4차:570,728,500원)

❍ 공사규모 : L=2,280m(지하차도 736m, 4차선)
수전설비 450㎾, 가로등 113등, 지하차도등 903등

❍ 시 공 사 : ㈜정안전기외 1개사

주요 설계변경 내용

❍  설계변경 사유(4차)

- 지하차도 집수정내 등기구 부착, 가로등 분전함 1면 신설, 가로등 표찰설치,          고가하부 투광등 설치 등에 따른 금액증감 및 공종조정으로 인한 변경

- 물가변동 1회~5회 실시공량에 의한 내역변경 및 물가변동 6회에 따른          계약금액 조정으로 인한 변경

❍  설계변경 세부내용(4차)

(단위:원)

구 분	전 체			비 고
	당 초	변 경	증 ․ 감
순공사비	355,291,099	370,154,129	증)14,863,030
제경비	92,114,401	92,074,321	감)70,080
물가변동액	115,323,000	63,616,000	감)51,707,000	ESC (1회~6회)
설계용역비	8,000,000	8,000,000	-
도 급 비	570,728,500	533,844,450	감)36,884,050

❍  설계변경 금액(4차)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감
4 차	570,728,500원	533,844,450원	감)36,884,050

조치의견

❍ 『남부순환로(개봉역 앞)구조개선 전기공사』 책임감리원의 『당초        계약물량 및 물가변동으로 계약금액 조정(ESC) 금액에 대한         정산 검토보고』가 적합하다고 판단 되므로 설계변경(4차-7회)을        시행하고 재무과에 설계변경을 의뢰하고자 함.

붙임  1. 감리단 검토의견서 1부.

2. 설계 변경내역서(4차-7회) 1부.  끝.