문서번호	원무과-2173
결재일자	2015.2.10.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	시설팀장	원무과장
김경종	조선행	02/10 김종환

서북병원 음압유지시설 설치공사

폐기물처리용역 설계변경 보고

2015. 2.

서울특별시 서북병원

(원 무 과)

서북병원 음압유지시설 설치공사

폐기물처리용역 설계변경 보고

『서북병원 음압유지시설 설치공사 폐기물처리 용역』관련 시설관리공단에서 제출된 설계변경사항에 대해 검토 후 결과를 보고 드림

용역개요

❍ 용 역 명 : 서북병원 음압유지시설 설치공사 폐기물처리 용역

❍ 용역기간 : 2014. 10. 21. ~ 2015. 2. 16.

❍ 계약금액 : 7,800,000원

❍ 계 약 자 : 서울환경 ********

❍ 용역내용 : 폐콘크리트(83톤) 및 혼합폐기물(28톤) 처리 등

시설관리공단 보고내용

❍ 관련근거 : 시설관리공단 공사감독1처-1324(2015. 2.9.)

❍ 보고내용 : 폐기물 변경(폐콘크리트 → 혼합폐기물)에 따른 설계변경

- 물량 증감현황

공 종		당 초	변 경	증 감
운 반	건설폐기물	98.54㎥	120㎥	증	21.43㎥
	소 계	98.54㎥	120㎥	증	21.43㎥
처 리	폐콘크리트	83톤	-	감	83톤
	혼합폐기물	28톤	90.86톤	증	62.86톤
	소 계	111톤	90.86톤	감	20.14톤

- 용역비 증감현황

구 분	당 초	변 경	증 감
총 용역비	7,800,000원	10,974,000원	증	3,174,000원

행정사항

❍ 시설관리공단에서 제출한 설계변경 사항에 대해 승인처리

❍ 본 용역에 대한 계약변경 후 준공처리

붙임 : 시설관리공단 실정보고서 1부.  끝.