투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	준공기한 연기 및 4차수 계약의뢰(강남순환8공구 구룡지하차도 전기공사)

우리 본부에서 시행 중인 「강남순환8공구 구룡지하차도 전기공사』 에 대해 아래와 같이 준공기한 연기 및 4차수 계약의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 강남순환도시고속도로 8공구 구룡지하차도 전기공사

나. 공사금액 : 총차 1,098,636,000원

다. 시 공 사 : (주)진영전력

라. 준공기한 연기

○ 공사기간 변경 현황

구 분	당 초	변 경	비 고
전기공사	2012.08.02.~2015.02.28	2012.08.02.~2015.12.31	10개월 연장

○ 연기사유 : 선행 공정인 토목공사 공사지연으로 후속공정인 전기공사 시공여건 미조성

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

마. 4차수 계약의뢰 현황

(단위:원)

구 분		계 약 금 액	공사기간	비 고
전기공사	총 차	1,098,636,000	‘12.08.02~’15.12.31	금액-변경없음 기간-10월연장
	1 차	78,000,000	‘12.08.02~’12.12.31	준 공
	2 차	676,168,760	‘13.01.21~’14.02.20	준 공
	3 차	181,896,000	‘14.03.01~’15.02.28	준 공
	4 차	162,571,240	착공일로부터~‘15.12.31	금차계약

따로붙임 : 1. 준공기한 연기 및 4차수 계약 검토 보고서 1부.

2. 합의각서 1부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장),건설총괄부장
주무관	곽용길		열빛총괄과장	이달영		설비부장	02/10 박기형
협조자	계약1팀장	김점선
시행	설비부-1757	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8604	/전송	02-3708-8659	/	yong9345@seoul.go.kr	/	부분공개(6)