문서번호	계약심사과-2332
결재일자	2015.2.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	심사총괄팀장	계약심사과장		재무국장
하옥수	권무순	김성규		02/10 박재민
협 조
	토목심사팀장		정지항
	건축심사팀장		서홍일
	설비심사팀장		김중영

□설계경제성 심사 운영지침□ 개정

2015. 2.

재  무  국

(계약심사과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

「설계경제성 심사 운영지침」개정

사전계약심사(50억원 이상 ~ 100억원 미만)의 운영성과를 제고하고, ’설계의 경제성 등 검토‘ 법정 의무 대상(100억원 이상) 사업으로 점차적으로 확대하기 위해 지침을 개정 함

Ⅰ		운영지침 개요

▢ 관 련

○ 시장방침 제359호(2012.11.19.)

○ 사전계약심사 운영지침 제정(계약심사과-18803호, 2012.12.26)

○ 설계경제성 심사제도 도입계획(행정1부시장방침 제29호, 2015.1.30)

▢ 시행일자 : 2015. 2.   자

Ⅱ		주요 개정내용

▢ 운영지침 명칭 변경

○ 설계의 경제성(VE) 검토 업무를 명확하게 함축하고, 원가심사 업무인 계약심사와 구분되도록 개칭

현행	사전계약심사	⇨	변경	설계경제성 심사

설계의 경제성(VE: Value Engineering) 검토란 최소의 생애주기비용(Life Cycle Cost)으로 시설물의 필요기능 확보를 위해 전문가팀 구성・워크숍 수행으로 설계 내용에 대한 경제성 및 현장 적용 타당성 등을 기능별・대안별로 검토하는 것

▢ 적용대상 확대

○ 법정의무대상 사업인 총공사비 100억원 이상 공사까지 설계VE 심사를

점차 확대

《 ※ 연도별 확대 계획(100억원 이상)  》

2015년 2016년 2017년
▶ 총공사비 100억원 이상 공사(단순 2건)	▶ 단순공사 적용 (VE전담팀(3명) 신설운영) ※ 13건 심사 예정	▶ 단순․보통․복잡 공사 적용 ※ 38건 심사 예정

▢ 법적 절차와 기준 내용 반영

○ 대상사업, 신청시기, 업무처리절차, 외부전문가 수당지급 기준, 서식 등

※ 100억원 이상에 대한 심사 시 등 VE 발생비용은 발주기관에서 부담

Ⅲ		업무 흐름도

①설계경제성 심사 신청	➡	② 심사계획 수립 (팀구성 등)	➡	③ 설계도서 사전검토 및 심사 시행		➡	④ 심사결과 통보
발주담당자		총괄담당자		외부전문가 및 직원			분야별 심사담당자
발주부서		계약심사과

○ 설계경제성 심사 업무 흐름도

설계경제성

심사 신청

※ 설계경제성 심사 제외사업 업무 흐름도

① 심사제외 신청		➡	② 심사실효성 검토회의 준비	➡	③ 설계경제성심사 실효성 검토회의	➡	④ 회의결과 통보 (*회의결과 설계경제성 심사 대상일 경우 위 ③번 부터 진행)
발주담당자			분야별 심사담당자		외부전문가 및 직원		분야별 심사담당자
발주부서			계약심사과

Ⅳ		향후 추진일정

○ 개정 운영지침 시행                              : ’15. 2월 중

붙임 :「서울특별시 설계경제성 심사 운영지침」1부

붙 임

서울특별시 설계경제성 심사 운영지침

[시행 2013. 1. 1][일부개정 2014. 1. 1][2015. 2.  전부개정]

제1조(목   적) 이 지침은 설계경제성 심사업무에 대한 기본적인 사항을 규정함을

목적으로 한다.

제2조(용어 정의) 이 지침에 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “설계의 경제성 심사”란 최소의 생애주기비용으로 시설물의 필요한 기능을 확보하기 위하여 여러 분야의 전문가로 설계의 경제성 등 심사 팀을 구성하고 워크숍을 수행하여 설계내용에 대한 경제성 및 현장 적용의 타당성을 기능별, 대안별로 검토하는 것을 말하며, 법령에서는 설계의 경제성 등 검토, 각종 문헌에서 VE(Value  Engineering), 설계VE라고 사용하고 있다.

2. “생애주기비용”이란 시설물의 내구연한 동안 투입되는 총비용을 말한다. 여기에는 기획, 조사, 설계, 조달, 시공, 운영, 유지관리, 철거 등의 비용 및 잔존가치가 포함된다.

3. VE 요청부서의 장이란 VE 시행을 요청하는 발주부서의 장 또는 사업주관 부서의 장

4. 법정의무 대상 사업의 VE 심사 : 국토교통부「설계의 경제성 등 검토에 관한 시행지침」제4조의 검토대상 사업에 대한 VE심사를 말한다.

5. 법정의무 비대상 사업의 VE 심사 : 「설계의 경제성 등 검토에 관한 시행지침」 제4조의 검토대상 사업 이외의 총공사비 50억원 이상 100억원 미만의 사업에 대한 VE심사를 말한다.

제3조(대상사업) ① 설계경제성 심사 대상사업은 총공사비 50억원 이상의 공사

로 법정의무 대상 사업의 VE 심사(100억원 이상)와 법정의무 비대상 사업의 VE 심사(50억원 이상 ~ 100억원 미만)를 포함하며, 발주부서는 의무적으로 설계경제성 심사를 요청하여야 한다.

② 다만, 법정의무대상 사업의 설계경제성 심사는 연도별 확대계획에 따르되, 2015년의 경우에는 시범사업 대상으로 선정된 공사에 한한다.

제4조(제외사업 및 처리절차 등) ① 법정의무 비대상 사업에 한하여 단순 공

정의 연간단가계약공사 등 설계경제성 심사의 실익이 현저히 떨어지는 사업은 다음 각 호의 경우에 예외적으로 심사 대상에서 제외할 수 있다.

1. 발주부서에서 심사제외 신청서를 제출한 때

2. 계약심사과에서 심사의 실익이 현저히 떨어진다고 판단될 때

② 제1항 각 호의 경우 계약심사과에서는 설계경제성 심사실효성 검토회의를 개최하여야 한다.

③ 검토회의 참석자는 발주부서담당, 계약심사과 업무 관련자(심사총괄팀장, 토목팀장, 건축팀장, 설비팀장 등), 해당 외부전문가 1인 이상 등으로 구성한다.

④ 검토회의 결과는 신청 접수일로부터 7일 이내에 통보한다.

⑤ 심사실효성 검토회의를 거친 사업도 설계VE 심사를 한 것으로 본다.

제5조(대상기관) 설계경제성 심사 대상기관은 본청, 사업소, 투자․출연기관, 자치

구로 한다. 다만, 자치구의 대상사업은 시비 재배정 사업과 국비·시비 보조사업에 한한다.

제6조(신청시기) 발주부서에서는 실시설계 60% 이전에 설계경제성 심사를 신청

한다.

제7조(신청방법) 발주부서에서 설계경제성 심사를 신청하는 경우에는 별지 제1호

서식 “설계경제성 심사 신청서”에 따라 다음과 같은 관련 서류를 첨부하여 계약심사과로 신청하여야 한다. 심사 제외 신청 시에도 관련 서류를 첨부하여 신청하여야 한다.

1. 설계도면(설계도 작성이 안 된 경우 스케치로 대체)

2. 지형도 및 지질자료

3. 설계기준, 사업내역서, 공사비산출서

4. 표준시방서, 전문시방서, 공사시방서 및 설계업무 지침서

5. 현장 설명용 발표자료 등

6. 관련법규 등에 기초한 협의 및 허가 수속 등의 진행상황

7. 기타 필요하다고 인정하여 요구하는 자료

제8조(전담팀 구성) ① 설계경제성 심사를 위하여 사업별 전담팀을 계약심사과 내

에 설치한다.

② 사업별 전담팀은 VE담당관, VE책임자(leader), 팀원으로 구성한다.

③ 제1항에 따른 전담팀은 5인 이상 15인 이하로 구성하되 외부 전문가는 전담팀의 50%이내로 한다.

제9조(업무담당) ① VE책임자(leader)는 VE수행절차에 대한 이해도가 높은 외

부전문가로 팀원, 발주부서 담당자, 설계자 등 이해관계자 간의 의사소통을 원활히이끌어 내는 자로, 설계 심사업무를 총괄하여 진행한다. 또한 VE 제안서를 작성하고, VE담당관, VE요청부서 등과 협조하여 VE 최종보고서를 완성한다.

② VE담당관은 계약심사과 설계경제성 심사 대상사업 담당으로 하며, 회의결과 정리, 보고서 작성, 설계경제성 심사 결과를 발주부서에 통보하고 처리결과에 대한 사후관리를 한다.

③ 팀원은 분야별 외부전문가, 계약심사과 분야별 팀원(팀장포함 가능)으로 선정하고, 정보 분석, 검토, 아이디어 제안, 발표, 평가에 참여한다.

④ 계약심사과 총괄담당은 설계경제성 심사 전담팀을 구성하고 진행에 필요한 업무를 지원한다.

⑤ 설계자는 다음 각 호의 역할을 성실히 수행한다.

1. VE 준비단계에서 사전설명회(현장설명회 등) 참가하여 VE책임자와 전담팀으로부터 요구되는 정보의 유형을 파악하고 VE수행을 위해 요구되는 각종 정보를 충실히 제공한다.

2. VE 분석단계 중 정보수집 단계에서는 설계 개념에 대한 정보를 제공하기 위한 발표를 하여야 한다.(특히, 기술적 부분이 주요 논제가 될 경우에 설계팀의 각 기술분야 설계자들도 함께 참석해서 설명할 수 있다.)

3. VE 실행단계에서 VE제안에 대한 기술검토를 수행하여야 하며, VE책임자로부터 받은 VE제안사항을 검토하고 이에 대한 의견을 개진하여야 한다. VE실행을 위한 발주부서의 최종 적용성 검토시 이의 채택여부를 설계부서 담당자와 함께 협의한다.

4. 승인된 VE 제안의 조치계획서를 작성하고 이를 발주부서에 제출하며, 만약, VE제안을 거부할 경우 이에 대한 명확하고 타당한 이유를 밝혀야 하며, 이를 위한 각종 기술적 증빙자료도 제출하여야 하고, 승인된 VE 제안에 대해서는 즉각적인 수정설계를 착수 하여야 한다.

제10조(전담팀 심사내용) ① 전담팀은 다음 각 호의 내용을 심사한다.

1. 건설공사의 설계, 시공 및 유지관리에 필요한 경제성

2. 시설물의 안전 및 공사시행의 적정성

3. 새로운 기술 및 신공법 적용의 가능성

4. 기타 설계경제성 심사에 필요한 사항 등

제11조(검토방법) VE검토는 안전성, 경관성, 내구성 및 기능을 손상하지 않는 범위

에서 유지관리비 등을 포함시킨 생애주기비용의 관점에서 행한다. 다만, 생애주기비용의 관점에서 설계의 경제성 등 심사가 불가능한 경우에는 건설사업비용의 관점에서 분석 검토한다.

제12조(위원 위촉 및 임기) ① 설계경제성 심사 외부전문가(위원)는 70명 이내로

구성한다.

② 위원의 임기는 2년으로 하되, 연임할 수 있다.

③ 제2항에 따른 위원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자 중에서 시장이 위촉한다.

1. 설계 경제성(VE) 전문자격증(CVS) 보유자 및 실무경험이 풍부한 자

2. 해당 분야의 기술사 또는 박사학위 소지자

3. 해당 분야에서 5년 이상 원가산출 및 분석연구에 종사한 자

4. 퇴직공무원 등 현장실무 경험이 많은 기술자

제13조(심사 처리절차) 설계경제성 심사 업무 처리 절차는 「별첨」과 같이 한다.

제14조(설계경제성 심사 제안서 제출) VE담당관은 설계경제성 심사과정에서 도

출된 내용을 별지 제2호서식 “설계경제성 심사 제안서”와 “생애주기비용 절감‧가치향상 제안서”, “개략도”를 VE요청부서의 장에게 송부하여야 한다.

제15조(VE제안 채택여부 결정) VE요청부서의 장은 설계경제성 심사 제안서가

제출된 날로부터 14일 이내에 VE제안에 대한 채택여부를 별지 3호서식 “제안채택 및 설계반영 계획”을 계약심사과에 통보하여야 한다.

제16조(사후관리) ① VE요청부서의 장은 VE를 채택한 경우에는 채택된 제안을

설계내용에 반영하도록 조치하고, 설계자는 최종 설계성과품 납품과 동시에 설계 경제성 심사 제안 내용에 대한 설계 반영결과를 별지 제4호 서식 “설계경제성 심사 제안의 설계반영결과 보고”에 따라 작성하여 설계 도서 등과 함께 VE요청부서의 장에게 제출하여야 한다.

② VE요청부서의 장은 제안내용 및 채택여부 등과 관련하여 매년 12월 31일을 기준으로 별지 제5호서식 “설계 경제성 검토 실시결과”를 다음 연도 1월 말까지 기술심사담당관에게 제출하여야 한다.

③ VE요청부서의 장은 법정의무대상(100억원 이상) 사업의 VE심사에서 채택한 제안 및 제안내용에 대하여 유사한 설계수행시 참고할 수 있도록 제16조의 규정에 따른 제안채택일로부터 30일 이내에 관련 자료를 건설사업정보 포털시스템 설계VE마당에 등재하여야 한다.

제17조(실적관리) VE의 전문성 확보와 기술력을 발전시키고자 전담팀 외부위원

에 대한 개인 실적관리를 하고, 전담팀에 참석한 위원의 개인별 실적증명서(별지 제6호서식)를 발급 할 수 있다.

제18조(외부전문가 수당 지급) ① 설계경제성 심사에 참여한 외부전문가(위원)에게

는 예산의 범위 안에서 수당 등을 지급한다. 다만, 설계경제성 심사에 소요되는 비용은 VE요청부서의 예산으로 지급하게 할 수 있다.

② 외부전문가 수당은 한국엔지니어링협회 발표「엔지니어링기술자 노임단가」의 ‘기술사, 건설 및 기타’ 노임에 준하여 지급한다. 다만, 리더는 기술료(설계도서검토비, 참석수당 합계액의 20%), 보고서 작성시 보고서 작성수수료를 지급할 수 있다.

③ 설계도서 검토비 지급일수는 다음의 기간으로 지급할 수 있다.

․리더 : 사전검토기간 3일  ․위원 : 사전검토기간 1일

제19조(업무 협조) VE담당관은 필요한 경우 당해 심사안건에 대하여 VE요청부

서로 하여금 자료 요청 등을 할 수 있고, VE 요청부서는 특별한 일이 없는 경우 심사안건에 대한 설명과 현장확인시 참석, 심사단계별로 요구되는 각종 정보 요구 및 자료 제출에 적극 협조 하여야 한다.

제20조(심사결과 반영) VE요청부서는 제안된 내용이 기술적으로 적용이 곤란 하

거나 비용을 현저히 증가 시키는 등 특별한 사유가 없으면 설계에 반영하여야 한다. 다만, 반영이 곤란한 경우에는 미반영 사유를 명확하게 제시하여야 한다.

제21조(보 칙) 그 밖에 이 지침에서 정하지 않은 사항은 국토교통부 설계의 경제성

등 검토에 관한 시행지침, 기술심사담당관 설계의 경제성검토(VE) 가이드라인, 서울특별시 계약심사 업무처리 규칙 등을 준용한다.

부   칙

이 지침은 2015. 2.  부터 시행한다.

【 별 첨 】

설계경제성 심사 업무 처리 절차

		【 단위업무 】		【 주요 업무 내용 】
신청		설계경제성 심사 신청 (발주부서 → 계약심사과)		‧ 설계경제성 심사 신청서(사업개요, 설계도서 등) 제출 ※ 설계경제성 심사제외 접수시는 심사실효성 검토 회의 개최 후 회의결과를 7일 이내에 통보
		⇩
준비단계		설계경제성 심사 계획 수립(3일) (총괄 담당자)		‧ 전담팀 구성, 시행방법 등 실시계획 수립, 설계도서 등 배포 - 전담팀 구성원 규모 및 활동 장소 ‧기간 등의 결정
		⇩
		설계도서 사전 검토 등(2일) (외부전문가 및 직원)		‧ 현장 확인 및 설계서 설명(설계자) ‧ 설계관련 자료 수집, 설계도서(안), 보고서, 공사비 산출내역서 등 사전 검토
		⇩
분석단계		설계경제성 심사 시행(15일) (외부전문가 및 직원)		‧ VE 검토대상 선정, 설계안 검토 및 기능분석, 아이디어 제시, 아이디어의 평가, 대안의 구체화, 제안서 작성 및 발표
		⇩
		설계경제성 심사 제안서 제출(5일) (계약심사과 → 발주부서)		‧ 설계경제성 심사 제안서 통보
		⇩
실행단계		제안서 검토 및 반영계획 제출 (14일 이내)(발주부서 → 계약심사과)		‧ 설계경제성 심사제안서 수용여부 결정 (발주기관) 및 통보
		⇩
		최종보고서 작성 및 통보 (계약심사과 → 발주부서)		‧ 최종보고서 작성 및 결과 통보 - VE활동에 대한 내용과 제안 및 채택 안건을 모두 수록
		※ 발주부서 후속조치
		VE 심사 결과 제출 (설계자 → 발주부서)		‧ 설계경제성 심사 제안의 설계반영결과보고서 제출 - 조치내용을 확인할 수 있는 수정, 보완 설계도면 또는 설계도서 등을 첨부하여 발주부서에 제출
		포털시스템 등재 (제안채택일로부터 30일 이내)		‧ 건설사업정보 포털시스템 설계VE마당에 등재 ※ 법정의무대상(100억원이상) 심사 건만 해당
		심사 실시결과 제출 (다음 연도 1월말까지) (발주부서 → 기술심사담당관)		‧ “설계의 경제성 검토 실시결과” 제출

【별지 제1호서식】

설계경제성 (□심사 □심사제외) 신청서

OOO사업 실시설계에 대하여 다음과 같이 설계경제성 (□심사 □심사제외)를 신청합니다.

1. 사 업 명 :  OO    사업

2. 사업개요

○ 주 용 도 :

○ 부지면적 :

○ 규    모 :

3. 위    치 :

4. 공 사 비 :       백만원

○ 입찰방법 :

○ 총사업비 : 용역비(설계     감리     ), 공사비      , 보상비 등

5. 사업기간 :

6. 실시설계 공정률(%) :      % (설계내역서 유, 무 여부 표시)

7. 설계상 특기사항

-

-

붙 임 : 1. 설계경제성 심사 대상사업 현황 1부

2. 설계경제성 심사 제약사항 1부

3. 설계경제성 심사 제외 사유(심사제외 신청시에만 제출) 1부

20  .   .

신청부서 :

서울시 계약심사과장 귀하

설계경제성 심사 대상사업 현황

□ 조감도 및 시설계획도

「현장 위치도」

「조감도 및 평면도」

□ 사업현황

○ 공사개요 :

○ 위    치 :

○ 총공사비 :                   (백만원)

○ 공사기간 :

□ 주요 공법

□ 공종별 규모

공 종	공사물량	공사비(백만원)	비율(%)
계			100

□ 추진경과(인가, 허가, 승인 등 행정절차 중심으로 작성)

○ 20  .  .  :

□ 총사업비 현황

○ 총사업비 :          백만원

○ 공 사 비 :          백만원

○ 기    타 :          백만원

□ 행정절차 이행 완료여부

○ 20  .    .  : 000인허가

설계경제성 심사 제약사항

○ 공사명 :  OO사업                                      20  .    .     .

연번	제 약 사 항		사 유 (구체적으로 작성)	비고
	법적사항	법적 외 사항 (민원, 예산 등)

※ 제약사항이 없는 경우 설계경제성 심사 시 공사계획 및 예산타당성 등 모든 분야를

종합검토 함.

년     월     일

작성자 :  담당           (인)

확인자 :  발주기관장     (인)

【별지 제1-1호서식】

설계경제성 심사 제외 사유

○ 공사명 :  OO사업

연번	사 유 (구체적으로 작성)	비고

년     월     일

작성자(담당) :             (인)

확인자(발주기관장) :             (인)

【별지 제2호서식】

설계 경제성 심사 제안서
VE리더	① 상호 또는 명칭		② 면허 또는 등록 번 호
	③ 주 소	(전화 : )
	④ 대 표 자 성 명		⑤ 생 년 월 일
사 업 개 요	⑥ 사 업 명
	⑦ 사 업 비		⑧ 사 업 기 간
	⑨ 발 주 처		⑩ 담 당 부 서
제안내용	⑪ 제 안 건 수		⑫ 절 감 액
설계의 경제성 등 검토에 관한 시행지침 제11조제1항에 따라 사업의 설계의 경제성 등 검토제안서를 제출합니다. 년 월 일 VE리더 (인) 붙임 1. 생애주기비용절감・가치향상 제안서 2. 개략도 서울특별시 계약심사과장 귀하

생애주기비용절감․가치향상 제안서

제안서번호 :

사 업 명						발주청담당자
제안자명
제 안 명
제안내용		개 선 전				개 선 후
경제성평가결과		생애주기비용(LCC)절감효과					가치향상효과
		①	②	③	④	절감율 (④/L1×100%)	⑤		⑥	가치향상도 {(V2-V1)/V1}×100%)
		건설사업 비용	유지관리 비용	계(LCC) (=①+②)	절감액 (=L1-L2)		성능 점수 [P](점)		가치 점수 [V](점)
	개선전			L1=			P1=		V1=
	개선후			L2=			P2=		V2=
제안의특징		장 점			단 점				시공시 주의할점
효 과 (기술성)
※유지관리비용은 현재가치를 기입함 ※성능점수 및 가치점수는 공종 및 구성요소가 아닌 전체 프로젝트 기준으로 평가함 ※생애주기비용으로 설계의 경제성 검토가 불가능한 경우 「건설사업비용절감 제안서」로 대체

개     략     도

제안서번호/ 제안명		제안 1 /
개선전
개선후

【별지 제2-1호서식】

공사비절감 제안서

제안서번호 :

공사명								현장대리인
제안명								제안 종류
개선안내용	개 선 전					개 선 후
구 분				건설공사비			LCC				비 고
공사비내용	A	개 선 전
	B	개 선 후
	C	절감액(A-B)
	D	절감율(C/A×100%)
개선안특징		장 점			단 점				시공시 주의할 점
효 과 (기술성)
※ 제안종류는 개선제안(공법)과 일반제안(공법)으로 구분 기입 ※ 공사비내용은 계약금액을 기준으로 산정하고, 비고란에 성능 및 가치점수 등 기입

【별지 제3호서식】

- ○○○ 공사 설계경제성 심사 결과 -

제안채택 및 설계반영 계획

(사업명 :                                      )

20   .     .

기관명(부서명) :

1. VE 제안내용(총괄)

※ 상세내용 별첨 참조

2. 제안채택 및 조치계획

연번	제 안 명	VE절감액	채택여부	검토결과(사유)
계			○, ×
1
2
3
:

3. 미 반영사항 검토 결과

- 제안명 :

설계VE 제안내용
개략도	원 안	VE 개 선 안
장단점
미 반 영 사 유
검토결과

연번	제 안 명	개선전	개선후	절감액	절감률 (%)
계
1
2
3
:

※ 미 반영된 제안 건당 작성

【별지 제4호서식】

설계경제성 심사 제안의 설계반영결과 보고

○ 사업명 :

○ 대안별 반영 현황

제안No.	제안명	비용절감액(당초제안시)		비용절감액(최종설계반영시)		반영 여부
		공사비절감액	LCC절감액	공사비절감액	LCC절감액
제안1
제안2
제안3
제안4
제안5
제안6
제안7

※ 반영여부는 반영, 수정반영, 미반영으로 표시

○ 수정반영 및 최종 미반영 사유

제안No.	제안내용	수정반영/ 최종 미반영 사유

【별지 제5호서식】

설계 경제성 검토 실시결과 (     년)

발 주 기 관 :

(단위 :  건,  백만원)

설계의 경제성 심사 실시결과		자 체	외 주	계
당해연도에 완료된 “설계의 경제성 등 검토”의 횟수
당해연도에 완료된 “설계의 경제성 등 검토” 업무를 수행하는 데 소요된 비용
“설계의 경제성 등 검토”업무가 수행된 기존 설계내용의 예상 시공비용
제출된 제안의 수
제출된 제안의 절감액	건설사업비용
	생애주기비용
채택된 제안의 수
채택된 제안의 절감액	건설사업비용
	생애주기비용
“설계의 경제성 등 검토” 업무관련 총 교육비용 (참가자의 봉급, 여비 및 부대경비에 대한 견적을 포함)
당해년도 “설계의 경제성 등 검토”업무와 관련하여 교육받은 발주청 소속직원 수

	발주관서의 장	인

【별지 제6호서식】

개인 실적증명서

참여자	성 명					성 별				⃞ 남 ⃞ 여
	생년월일					전화번호
	소 속
	전문분야					담 당				리더 또는 팀원
	증명서 용도(제출처)		(제출처: )
경제성검토대상사업	사 업 명
	사업개요 (범위 / 기준 등)
	관리 번호	참여 기간 (일)		공사비(백만원)					개인실적(%)			비고
				당초	변경			차액	절감률		가치 향상률
증명서발급기관	위 사실을 증명합니다. 년 월 일
	기 관 명 : (인) (전화번호 : )
	주 소 :
	발급부서 :						담당자 : TEL)