문서번호	하천관리과-2173
결재일자	2015.2.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		치수설비팀장		하천관리과장
최년수		구자훈		02/11 정중곤
협 조

방재시설능력향상 기본및 실시설계 용역

(당인,상수,박미) 설계변경(정산) 검토보고

2015.  2.

도시안전본부

(하천관리과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

방재시설 능력향상 기본 및 실시설계 용역

(상수,당인,박미) 설계변경(정산) 검토보고

방재시설 능력향상 기본 및 실시설계 용역(상수,당인,박미)의 준공처리를 위한 설계변경(정산) 검토 보고임

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 방재시설 능력향상 기본 및 실시설계 용역(상수,당인,박미)

○ 용역기간 : 2013. 11. 13 ~ 2015. 2. 12

○ 계약금액 : 금459,833,000원(금사억오천구백팔십삼만삼천원)

○ 계약업체 : 동부엔지니어링(주)+(주)선진엔지니어링종합건축사무소

□ 설계변경 검토

○ 설계변경 사유 : 자문비 정산에 따른 감액 처리(-2,893,000원)

○ 설계변경 내역

(단위:원)

구 분		당 초	변 경	증 감	비 고
총 용 역 비		459,833,000	456,940,000	-2,893,000
용역비	방재시설능력향상 기본및실시설계	409,240,000	409,240,000
	자 문 비	4,500,000	1,875,000	-2,625,000
	손해배상보험료	4,290,000	4,290,000
	공급가액	418,030,000	415,400,000		5,000절삭
부가 가치세		41,803,000	41,540,000	-263,000
계		459,833,000	456,940,000

□ 조치의견

○ 위 검토내용과 같이 자문비를 정산하여 설계변경을 하고자 함.

첨 부 : 방재시설 능력향샹 용역 설계변경(정산) 내역서 1부. 끝.