문서번호	시설보수과-1160
결재일자	2015.2.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
김승진		02/11 박병연
협 조

- 2014년 도로시설물일상유지보수공사 - 개화IC교 자재변경 실정보고

2015.  2.

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

강서도로사업소

(시설보수과)

- 2014년 도로시설물 일상유지보수공사 -

개화IC교 자재변경 실정보고

도로시설물일상유지보수공사 사급자재(차량방호책)사용과 관련하여 자재수급 변경에 대한 실정보고임

Ⅰ		관련근거

❍ 11차 작업지시(개화IC교) 실정보고 : 시공사 종정제2015-2-091(’15.2.9)

Ⅱ		공사개요

❍ 공 사 명 : 2014년 도로시설물 일상유지보수공사(긴급)-강서

❍ 공사기간 : 2014. 4. 8 ~ 2015. 2.28

❍ 도 급 비 : 1,555천원

❍ 도 급 자 : 종정종합건설(주) 대표자 방은혜

❍ 공 종 율 : 95%

Ⅲ		보고내용

❍ 11차 작업지시된 개화IC교 차량방호책(3S 2단×W2000) 50경간        자재가 작업완료 기간내 공급이 어려워 시공하기가 곤란한 실정임

Ⅳ		검토의견

❍ 작업기간내 자재 수급이 가능하며, SB4등급 이상 가능한 자재로 대체하고자 함

※ 변경 자재 : 교량용 방호울타리(H900×W2000)- MSB401

(2014년 서울시 설계지침Ⅱ 제34호표)

❍ 개략 직접공사비 변경

- 당초 : 31,368천원 ⇒ 변경 : 19,498천원 (감11,869천원)

Ⅴ		조치계획

❍ 자재변경 처리 후 설계변경시 정산. 끝.