문서번호	도로보수과-927
결재일자	2015.2.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	동부도로사업소장
송광석		김환겸	02/11 송상영
협조
	주무관		박일연

설계변경(정산) 검토보고

도로.교통안전부속물유지보수공사(연간단가)

2015. 2.

설계변경(정산) 검토보고

도로,교통안전부속물 유지보수공사(연간단가)

우리 사업소에서 시행중인 『도로.교통안전부속물 유지보수공사(연간단가)』에 대한 설계

변경(정산) 검토 보고임

1		공사 개요

공 사 명 : 도로.교통안전부속물 유지보수공사(연간단가)

공사기간 : 2014. 3. 21 ~ 2015. 2. 28.

공사개요 : 시선유도봉 설치 530개

도로표지병 설치 15,544개

중앙분리대 설치 21경간

경계석 설치 120m

도 급 비 : 297,532,000원

도 급 자 : 디앤아이건설(주) 대표 이동원

2		변경사유 및 변경내용

설계변경 사유

o 도로부속물 및 교통안전부속물 공종별 수량 증ㆍ감

- 관급자재 및 이설비 정산

주요 변경내용

o 도로표지병 설치 감소 426개

o 시선유도봉 설치 추가 55개

공사비 변경 내역

(단위:원)

구 분		당 초	변 경	증 · 감	비 고
총 공 사 비		374,612,300	349,326,000	감) 25,286,300
도급비	공급가액	270,483,637	270,310,000	감) 173,637
	부가가치세	27,048,363	27,031,000	감) 17,363
	계	297,532,000	297,341,000	감) 191,000
관 급 비		48,391,450	48,131,000	감) 260,450
이 설 비		28,688,850	3,854,000	감) 24,834,850

3		조치 계획

위와 같이 설계변경 정산 처리코자 함

따로붙임 : 1. 설계변경 사유서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.  끝.