문서번호	시설개선과-1343
결재일자	2015.2.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설개선과장
이상욱		02/11 신동호
협 조
	주무관			이종환

- 잠실종합운동장 내 -

연식야구장 휀스 등 정비공사 시행 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 2.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

- 잠실종합운동장 내 -

연식야구장 휀스 등 정비공사 시행계획

잠실종합운동장 내 ‘어린이야구교실’ 수업장소인 연식야구장의 노후된 휀스 시설 등을 개선 정비하여 쾌적하고 안전한 환경을 조성, 양질의 교육공간 제공 및 시민 만족도를 높이고자 함.

추진배경

○ 시장님 면담을 통한 연식야구 활성화 지원 지시

- 2014. 7. 22. 한국연식야구연맹 회장단 시장 면담

○ 어린이연식야구장시설개선계획(스포츠마케팅과-12198호2014.12.05.)

- 어린이 연식야구장 그라운드, 전기, 건축, 부대시설 등에 대한 종합계획

- 시설개선 요구사항

▶ 인조잔디 교체 : 250백만원

- 외부 T55(3,300㎡)/ 내부실주경기장 T35(220㎡)  : 조경분야

▶ 기타 공사 : 50백만원

- 화단 정리 및(조경분야), - 1,3루 덕아웃에 비치, 강사탈의실 내 비치

- 실내조명 교체 및 외부 조명 및 가로등 정비 (전기분야)

- 휀스 정비(휀스 및 그물망 교체, 방호막 추가 등), 강사탈의실 설치 : (건축분야)

연식야구장 현황

○ 위    치 : 잠실종합운동장 주경기장 서측데크위

○ 연식야구장 개장 : 2011년  7월

○ 시설규모 : 지상1층 데크위  실외 면적 2,700㎡/ 실내 사용면적 220㎡

○ 건축분야 개선요구 현황

휀스 및 그물망 노후	내부 칸막이벽 설치 요청구간

공사 시행 계획(안)

○ 공사명 : 잠실종합운동장내 연식야구장 휀스 등 정비공사

○ 공사비 : 21,967,000원

○ 공사내용

- 휀스 정비(휀스 및 그물망 교체, 방호벽 추가 등), 강사탈의실 칸막이 설치 등

○ 공사기간 : 2015. 2월 ~ 2015. 3월 [착수일로부터 30일(공휴일 포함)]

○ 공사발주 방법 및 입찰 계획(안)

- 시행방법 : 수의계약(소액)

- 지방자치단체를 당사자로하는 계약에관한법률 시행령 제25조 제5

- 수의계약 사유 : 종합운동장내 어린이 연식야구장 개장 일정(3월말) 등에 맞추어                        조속한 공사의 시행 및 완료가 필요 함.

- 계약업체 : 주식회사 성준이엔씨 대표 이수경

건설산업기본법 제8조,제9조 규정에 의하여 “시설물유지관리업”으로                      등록된 업체로서 `14년 우리 사업소 연간단가 공사를 시행 현장여건을 잘                  알고 있는 업체 임.

- 확보예산 : 300,000천원(체육진흥기금)

- 예산과목 : 시민체육 및 국제스포츠 진흥발전, 전문체육육성(체육진흥기금), 꿈나무

육성 등 야구발전사업, 시설비 및 부대비, 시설비(401-01)

추진일정

○ 2015.  2.          공사발주 및 착공

○ 2015.  3. 15       공사완료

검토 및 처리의견

○ 노후한 연식야구장 시설개선을 통하여 시설이용객(어린이)의 민원해소 및 안전       하고 쾌적한 교육환경을 조성코자 하며,

○ 공사시행은 현장여건을 잘 알고 있는 사업소 `14년 연간단가 공사 업체 수의       계약 통하여 조속히 사업시행을 연식야구장 시설개선 및 대관 등에 만전을       기하고자 함.