내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	방재시설능력향상 용역(상수,당인,박미) 설계변경(정산)에 따른 변경계약 의뢰

우리과에서 시행중인 『방재시설 능력향상 기본 및 실시설계 용역(상수,당인,박미) 설계변경(자문비 정산)이 있어 다음과 같이 변경계약을 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

1. 용 역 명 : 방재시설 능력향상 기본 및 실시설계용역(상수,당인,박미)

2. 용역기간 : 2013. 11. 13 ~ 2015. 2. 12

3. 계약금액 : 금459,833,000원(금사억오천구백팔십삼만삼천원정)

4. 계약업체 : 동부엔진니어링(주)+(주)선진엔지니어링종합건축사사무소

5. 변경사유 : 자문비 정산에 따른 용역비 감액[감)2,893,000원]

6. 변경내역

(단위:원)

구 분		당 초	변 경	증 감	비 고
총 용 역 비		459,833,000	456,940,000	-2,893,000
용역비	방재시설능력향상 기본및실시설계	409,240,052	409,240,000
	자 문 비	4,500,000	1,875,000	-2,625,000
	손해배상보험료	4,290,000	4,290,000
	공급가액	418,030,000	415,400,000		5,000절삭
부가 가치세		41,803,000	41,540,000	-263,000
계		459,833,000	456,940,000

첨 부: 1. 설계변경 검토 보고서 1부.

2. 설계변경내역서 1부.

3. 합의각서 1부. 끝.

	하천관리과장
주무관	최년수		치수설비팀장	구자훈		하천관리과장	02/11 정중곤
협조자
시행	하천관리과-2207	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 별관1동 8층	/
전화	02-2133-3881	/전송	02-2133-1044	/	topnbr123@seoul.co.kr	/	대시민공개