투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	교통안전시설물 원인자부담공사 준공기한 연기 승인 통보(구로구 고척동 서남권야구장 주변 보도 Set-back 구간)

1. 서울특별시도시기반시설본부 설비부-1794(2015.2.10.)호 와 관련입니다.

2.  위 호와 관련하여 『교통안전시설 원인자부담공사 준공기한 연기 요청』에 대하여 아래와 같이 승인 통보하오니 공사품질 관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공사개요

1)공사명 : 구로구 고척동 서남권야구장 경인로 주변 보도 Set-back 구간                              교통안전시설물 설치공사(신호)

2)원인자 : 서울특별시도시기반시설본부(설비부)

3)시공사 : 청미이엔지㈜

4)공사기간

- 당초 : 2014.08.12.~2014.11.31.

- 변경 : 2014.08.12.~2015.06.30.

5)감리사 : ㈜트래픽스

3. 연기사유 : 토목공사 지연으로 인한 공사기간 연장.  끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
수신자	서울특별시도시기반시설본부장(설비부장),(주)트래픽스 책임감리원
★주무관	양상규		기전과장	02/11 박재경
협조자
시행	기전과-1944	(		)	접수		(		)
우	157-210	서울 강서구 양천로237(마곡동 67-1)	/
전화	2657-7969	/전송	2657-7939	/	ysg007@seoul.go.kr	/	대시민공개