투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신자	서울특별시장(재무과장)
(경유)
제 목	설계변경(3회-정산) 계약의뢰 (2014년 기전시설물 일상유지 보수공사(연간단가))

1. 우리사업소에서 시행중인 “2014년 기전시설물  일상유지 보수공사(연간단가계약)”의 설계변경 사유가 발생되어 아래와같이 변경계약 의뢰합니다.

가. 공 사 명 : 2014년 기전시설물 일상유지 보수공사(연간단가)

나. 도 급 자 : 기림전력㈜ 대표 장일성

다. 공사기한 : 2014.3.10 ~ 2015.2.28

라. 계약금액 : 190,652,000원

마. 변경사유 : 작업물량 조정 및 보험료 정산에 따른 설계변경

바. 변경금액                                             (단위 : 원)

변경전	변경후	증감액
199,386,000	190,652,000	감 8,734,000원

사. 예산과목 :

도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물관리,  도로기전시설물 일상유지

보수, 시설비(401-01)

첨부 : 1. 설계변경 3회 방침서 1부.

2. 설계변경 3회 내역서(갑, 을) 각 1부.

3. 합의각서 1부.

4. 제비율 검증표 1부. 끝.

	서울특별시 성동도로사업소장
주무관	문준호		기전과장	02/11 최주용
협조자	계약1팀장	김점선
시행	기전과-1015	(		)	접수		(		)
우	133-110	서울 성동구 강변북로 257 성수동1가 642-25	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-3780-0659	/전송	02-3780-0744	/	munjunhoo@seoul.go.kr	/	부분공개