문서번호	기전과-1012
결재일자	2015.2.11.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
문준호		최주용	02/11 이종엽
협조
	주무관		김윤희

2014년 기전시설물 일상유지보수공사(연간단가) 설계변경 3회(정산) 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 2

성동도로사업소

기전과

2014년 기전시설물 일상유지보수공사(연간단가) 설계변경(3회) 정산 검토보고

2014년 기전시설물 일상 유지보수공사(연가단가) 작업지시(3차)에 따른 완료보고서 집계결과 계약물량 변동이 있어 아래와같이 설계변경(정산)을 실시하고 3회 기성 준공처리코자 함

공사현황

▶ 공사명 : 2014년 기전시설물 일상 유지보수공사(연간단가계약)

▶ 공사개요

• 가로등 유지보수공사 1식

• 터널 및 지하차도 유지보수공사 1식

• 세척공사 1식

▶ 공사기간 : 2014. 3.10 ~ 2015. 2. 28

▶ 공 사 비 : 199,386,000원

▶ 도 급 자 : (주)기림전력  장일성

설계변경 현황

▶ 사유 : 추정물량으로 설계된 작업물량이 공사 추진과정 중 물량변동

발생으로 수량(내역)조정 필요

▶ 주요변경 내역

공종	규격	단위	수량		증 감
			변경전	변경후
전선관 배관	ST 54C 고가(철거)	m	515	490	감 25
전원 케이블배선	600V CV25㎟×2C 교량하부(철거)	m	16	40	증 24
전원 케이블배선	600V CV 6㎟×2C 교량하부(철거)	m	16	40	증 24
전원 케이블이설	600V CV10㎟×2C 교량하부(이설)	m	32	0	감 32
전원 케이블배선	600V CV16㎟×2C 교량하부(철거)	m	16	8	감 8
경비정산	건강, 연금, 노인장기요양, 산업안전보건관리비	식	1	0	감 1

▶ 설계변경 금액                                                        (단위 : 원)

구 분		변 경 전	변 경 후	증 감	비고
도급비	공급가액	181,260,000	173,320,000	감 7,940,000
	부 가 세	18,126,000	17,332,000	감 794,000
	합 계	199,386,000	190,652,000	감 8,734,000

예산과목

도시안전실/도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물관리, 도로기전시설물      일상유지보수, 시설비(401-01)

향후계획

물량변동 내역에 의거하여 설계변경(정산) 시행 후 3회 기성 준공 처리코자 함

첨부 : 3회 설계변경 내역서(갑, 을) 1부. 끝.