투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	계약변경의뢰-[경춘선 폐선부지 공원화 전기공사]

우리부에서 시행중인 「경춘선 폐선부지 공원화 전기공사」와 관련 설계변경 사항이 발생되어 아래와 같이 변경계약을 요청합니다.

1. 공 사 명 : 경춘선 폐선부지 공원화 전기공사

2. 계약번호 : 20131011874

3. 시 공 사 : 시대전기(주), 대표: 김정숙

4. 계약금액 : 154,316,000원

5. 공사기간 : 2013.10.10. ~ 2015.02.15.

6. 변경내용

[단위: 원]

구 분	당 초	변 경	증·감	비고
전기 (1차,총차)	154,316,000	149,844,000	(감)4,472,000

※ 공사기간 변동없음.

- 사유 : 보험료 정산에 따른 변경.

7. 예산과목

푸른도시국 공원조성과, 생활권공원확충, 도심공원확충,

경춘선 폐선부지 공원조성, 시설비 및 부대비, 시설비

붙임  1. 변경 검토보고서 및 내역서    1부.    끝.

	설비부장
주무관	박병환		건축설비과장	김영수		설비부장	02/11 박기형
협조자	경리과장	허금도
시행	설비부-1863	(		)	접수		(		)
우	100-777	서울 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02)3708-8628	/전송	02)3708-8659	/	pbhw2002@seoul.go.kr	/	대시민공개