문서번호	하천관리과-2212
결재일자	2015.2.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		하천관리과장	물순환기획관
이병우		정중곤	02/11 김학진
협조
	청계천관리팀장		김석권

「수표교길 연결 주변정비 방안 타당성조사 및 기본계획 용역」 전문가 자문회의 결과 보고(2차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 02.  .

도시안전본부

(하천관리관)

「수표교길 연결 주변정비 방안 타당성조사 및 기본계획 용역」

전문가 자문결과 보고(2차)

□ 자문개요

○ 일     시 : 2015. 02. 03(화) ~ 02. 09(월)

○ 방     법 : 자문위원 방문 자문사항 설명 및 검토의견서 취합

○ 위      원 : 총6명( 손영식, 박선규, 이삼희, 윤현섭, 여춘동, 박병선 )

○ 방문 설명 : 서울시 청계천관리팀장 및 업무담당

용역사(한일ENC 김재수, 상명종합건축 손동준)

○ 자문내용 : - “인접지역 도시관리계획 변경안”

- “2003년 안전진단 및 2014년 비파괴 강도시험 결과”

- “수표교 중건 기본계획안”

- “전통문화거리 조성계획안”

- “수표공원 조성계획안”

- “개략사업비 및 향후계획

□ 자문내용 요약

○ 문화재분야(손영식 위원)

- 수표교는 원위치에 이전하되 높이는 청계천의 현재 정비된 양안을                 감안하여 정비함이 좋겠음

- 수표교 이전 복원시 장충단공원 교량부재 외에 원 교대, 교각 받침,                 지대석, 수표(모형)까지 정비필요(중랑물재생센타 보관 부재포함)

- 수표교 하부는 기존 청계천의 흐르는 물을 이용하여 바닥에 물이                 있는 구조로 함이 좋겠음(기존 물 유도 또는 펌핑)

- 수표교 부재중 일부 풍화 또는 균열 부재는 가능한 보존처리하여 재              사용하도록 노력함이 좋겠음

- 수표교를 중심으로 청계천의 다리는 정월 대보름의 중요행사 중심지로               이전복원의 의미가 다른 일반다리와 다르다고 봄(다리 밟기 놀이)

- 수표교지 남측 공원은 편의시설을 제공하는 공간으로 활용함이 좋겠음           (예, 안내센타, 안내판 등)

○ 구조분야(박선규 위원)

- 수표교의 원부재를 최대한 활용하여 안전이 보장된 최신공법을 적용하여

복원할 것.

- 보수.보강공법 선정은 안전이 최우선이고 사용성이 보장되도록 할 것           - 수표교의 하부 기초부위와 상부구조의 보강을 철저히 하여 침하 및 하천류           수평력에 대하여 안전할 것

- 수표교 중건은 비교1안을 추천하되 부수적이고 복잡한 부속시설은 배제

○ 하천하도(이삼희 위원)

- 비교 1안, 2안, 3안 검토결과 2안 과 3안은 복제품을 토대로할 경우              현실적이며 통수박스 없이도 가능할 것임(진품의 경우 1안 가능)

- 1안의 경우 홍수시 박석포장 부위가 수중보형태가 되어 최종 홍수위에           대한 정확한 계산이 수반되어야 함

- 수표교 상류단은 분파천, 하류단은 합류천 형태를 취하게 되므로 2차원           수리계산이 병행되어야 하며 수리모형실험을 통해 검증절차 필요

- 수표교 하류부 완경사 형태 박석포장 대신 홍수류 에너지를 저감하는            다단계 낙차형태를 취하는 것이 이상적일 것임

- 측방수로 내에서는 홍수 직후 토사퇴적이 우려되므로 유지관리에 대한           충분한 검토가 이루어져야 함

- 측방수로에서 평수시 유량계산시 조도계수산정에 신중을 기해야할 것임,          홍수량산정에 적용한 조도계수가 아닌 평수시 유량산정에 적합한 조도           계수 값을 사용해야할 것 임

- 분파지점, 합류지점에서 하도 선형처리가 하천수리공학적 검토가 충분히          이루어져야 할 것 임

○ 도로.안전(윤현섭 위원)

- 청계천 좌.우측의 통수박스 설치로 통수단면을 확보하는 방안은 적정함

- 1안에서 하상을 인상하여 본래 형하공간 유지방안은 조선시대 교량형상을          재현하는 측면에서 합리적이나 평시 교량하부 건천화 문제 대책필요

- 1안을 적용할 경우 홍수시 성토부 세굴에 안전한 재료와 공법적용 검토

- 2안 홍수시 대부분의 유량을 양안박스로 통수되도록 수문을 계획하였으나           청계천의 상징성과 수표교 중건 취지와 어울리지 않음

- 3안 합리성이 미약한 방안으로 판단 함

- 기초처리 : 하상구간은 홍수시에 교량기초 하부가 세굴될 경우 교량이           파괴될 수 있는 바 세굴방지 공법을 적용 바람

○ 도시계획(여춘동 위원)

- 상위계획과 주변 관련계획/사업 등을 면밀히 검토하여 수표교 연결시             주변지역과의 정합성이 유지될 수 있도록 계획

- 향후 수표교 연결에 따른 주변지역에 문제가 없도록 구체적인 대응전략            제시 필요

○ 교통분야(박병선 위원)

- 기존 임시 수표교는 철거하는지 여부에 대한 언급이 없음, 철거한다면           기존 횡단보도 및 노면표지 삭제하고 새로운 위치에 횡단보도 도색과            신호등 이설 필요

- 청계천로 도로선형 및 도로경계선에 대해서는 주변 관련사업과 긴밀한           협의와 합의가 필요 함

- 본 사업은 교통영향 평가(교통영향분석 및 개선대책) 대상이 아니므로

향후추진계획 수정 바람

□ 향후계획

○ 금번 자문사항을 용역사에서 검토.보완 하도록  조치

○ 용역사 검토보완 사항을 2월 16일 기획조정소위원회 개최시 논의.조정

○ 기획조정소위원회 논의.조정 결과를 2월27일 청계천 전체회의에 보고

○ 청계천시민위원회 전체회의 보고결과를 용역보고서에 반영.

붙임 : 자문 자료 및 위원(6명) 검토의견서 각1부.  끝.