문서번호	물재생과-915
결재일자	2015.2.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생과장
김근수		02/11 강병수
협 조
	주무관			최승룡

『침사지 및 포기조 반류수처리구간 악취방지FRP 정비공사공사』

공사현장 실정보고 및 조치계획 검토

2015. 2

중랑물재생센터

[물재생과]

공사현장 실정보고 및 조치계획 검토

우리센터에서 추진중인『침사지 및 포기조 반류수(3처리장)처리  구간 악취방지 FRP 정비공사』시행 중 현장 문제점에 대한 조치계획을 검토 보고함

Ⅰ		공 사 개 요

공 사 명 : 침사지 및 포기조 반류수(3처리장)처리구간 악취방지 FRP 정비공사

공사기간 : 2014. 12. 29 ~ 2015. 02. 20

도 급 액 : 195,865,000원

공사개요 : 3,4처리장 침사지 밀폐뚜껑 6조, 3처리장 포기조 뚜껑 4개조정비

도 급 자 : 토네이도건설(주)  대표  방경임

Ⅱ		보고내용

실정보고 내용

○ #3,4처리장 침사지 개폐부 콘크리트 구조물 밀폐시설인 FRP 보수를 6개조의 계획

되었으나, 공사중 점검결과 #3처리장 1개조의 추가보수가 필요한 실정임

○ 당초 설계에 반영된 폐콘크리트 폐기물 처리비가 반영되었으나, 시공과정에서

콘크리트 폐기물이 발생되지 않아 계약내역에서 삭제 필요

Ⅲ		대책 및 검토 내용

○ #3처리장의 기존 FRP 뚜껑 1개조를 금번공사에 포함하여 파손부 보수 및 도장, 롤러교체, 고장시 필요한 고리를 설치하여 유지관리에 원활을 기하고자 함

(사업비 약1,000천원 증액)

○ 설계에 반영된 건설폐기물 처리 38㎥는 설계내역에서 제외하여 도급비감액처리 하고자함(사업비 약2,000천원 감액)

Ⅳ		조치계획

○ 위의 검토내용과 같이 시공사로 하여금 우선 변경 시공토록 조치 하고, 추후 설계변경시 수량변경 등에 대해 반영하고,

○ 도급비 범위내에서 계약금액을 변경하고 보험료 및 수수료는 추후 설계변경시 정산조치 하고자 함

첨부 : 위치도 및 현황사진 1부. 끝.