내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서울특별시
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경(정산) 시행

1. 우리 부서에서 시행중인 아래 용역에 대하여 설계변경(정산) 시행코자 합니다.

가. 용역명 : 차집관로 수문 성능개선 기본 및 실시설계

나. 개요 : 시설물 현황 측량 3,400㎡, 시설물 현황조사 136개소, 기타

다. 기간 : 2014. 5. 29 ~ 2015. 2. 17

라. 예산과목 : 도시안전실 물재생시설과, 물재생시설 개선 및 관리, 물재

생시설개선, 시설비(206-401-01)

마. 도급사 : (주)유신

바. 설계변경 사유 : 과업 물량 감소 외(붙임)

사. 주요 변경 내역 : 세부내용 붙임(변경내역서 참조)

공 종	단위	당초 수량	변경 수량	증․감
시설물 현황측량	㎡	3,400	3,450	증 50
시설물 현황조사	개소	136	138	증 2
자문료	천원	1,800	700	감 1,100

첨부 : 1. 설계변경 사유서 1부.

2. 변경 내역서 1부. 끝.

주무관	박만헌		물재생운영팀장	정훈모		물재생시설과장	02/11 이철해
협조자	주무관	강청금
시행	물재생시설과-1881	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 덕수궁길 15 (서소문청사 1동 8층)	/
전화	02-2133-3831	/전송	02-2133-1043	/	parkmjr@seoul.go.kr	/	대시민공개