문서번호	설비부-1823
결재일자	2015.2.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	건축설비과장	설비부장
박병환	김영수	02/11 박기형

『경춘선 폐선부지 공원조성 전기공사』

설계변경 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 2.

도시기반시설본부

[건축설비과]

『경춘선 폐선부지 공원조성 전기공사』

설계변경 검토 보고

『경춘선 폐선부지 공원조성 전기공사』와 관련하여 책임감리원으로부터 법정보험료 정산 등 설계변경 검토보고가 있어 아래와 같이 보고 드림.

관련근거

○ 감리15-132(‘15.02.10)

법정보험료 등 정산변경 검토보고(경춘선 폐선부지 공원조성 전기공사)

○ 시대(경춘)2015-1호(‘15.02.10)

법정보험료 및 퇴직공제부금비 정산 변경보고 및 계약요청

공사개요

○ 공 사 명 : 경춘선 폐선부지 공원조성 전기공사

○ 규    모 : 공원조성구간 1.9km, 공원등 90본, 분전반 4면

○ 계 약 자 : 시대전기(주), 대표 김정숙

○ 공사기한 : 2013.10.10. ~ 2015.02.15.

○ 계약금액 : ₩154,316,000원

○ 감 리 단 : ㈜유신, 책임감리원 윤상렬

보고내용

○ 변경 사업비

(금액 :원)

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
총 공사비	309,265,000	304,793,000	(감)4,472,000
도급비	154,316,000	149,844,000	(감)4,472,000
관급비	146,589,000	146,569,000	-
이전비	8,380,000	8,380,000	-

○ 설계변경 사유

- 지방자치단체 입찰 및 계약기준 제1장 7절 사후정산에 따른 법정보험료(건강, 연금, 노인) 및 퇴직공제부금비 등 정산 설계변경

○ 정산대상 및 변경현황

(단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
건강보험료	945	0	(감)945	- 증빙자료 및 해당사항없음
연금보험료	1,384	0	(감)1,384
노인장기요양보험료	62	0	(감)62
퇴직공제부금비	1,108	0	(감)1,108

○ 공사비 변경현황

(단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
순공사비	96,155	96,155	0
2. 간접노무비	4,673	4,673	0
3. 고용보험료	418	418	0
4. 산재보험료	1,955	1,955	0
5. 안전관리비	2,852	2,852	0
6. 건강보험료	945	0	(감)945
7. 연금보험료	1,384	0	(감)1,384
8. 노인장기요양보험료	62	0	(감)62
9. 기타경비	6,331	6,331	0
10. 퇴직공제부금비	1,108	0	(감)1,108
가. 순공사원가	115,883	112,384	(감)3,499
나. 일반관리비	6,953	6,743	(감)210
다. 이윤	7,240	6,884	(감)356
라. 설계비	10,211	10,211	0
① 공급가액	140,287	136,222	(감)4,065
② 부가가치세	14,029	13,622	(감)407
③ 도급액	154,316	149,844	(감)4,472
④ 관급자재비	146,569	146,569	0
⑤ 한전인입공사비	8,380	8,380	0
⑥ 총사업비	309,265	304,793	(감)4,472

담당자 검토의견

○ 경춘선 폐선부지 공원화 전기공사 책임감리원의 『법정보험료 등 정산변경 검토보고』건에 대한 검토 결과 적합하다고 판단되어 설계변경 후 처리코자 함.

○ 건설총괄부에 계약변경의뢰를 시행코자 합니다.  끝.

붙임 :  1. 감리단 검토의견서    1부. 끝.