투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	9호선 2단계 915공구 전기공사 및 소방(전기분야)공사 하도급 공사기간 변경계약 통보

1. 동일(현) 제15-84호, 85호(2015.02.09)호와 관련입니다.

2. 지하철 9호선2단계 915공구 건설공사와 관련 전기공사 및 소방(전기분야)의 하도급 공사기간 변경계약 내용을 알려드리오니 관련업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 하도급 변경계약 내용

○ 전기공사

구분	원도급 업체명	하도급 업체명	도급액 (천원)	하도급액 (천원)	하도급율	공사기간
당초	경남기업 (주)	동영기업 (합)	1,943,470	1,980,000	101.88%	‘12.11.05 ~‘14.12.30
변경	경남기업 (주)	동영기업 (합)	1,943,470	1,980,000	101.88%	‘12.11.05 ~‘15.04.01

○ 소방(전기분야)

구분	원도급 업체명	하도급 업체명	도급액 (천원)	하도급액 (천원)	하도급율	공사기간
당초	경남기업 (주)	(주)경우 이엔씨	595,970	559,000	93.8%	‘12.11.27 ~‘14.12.30
변경	경남기업 (주)	(주)경우 이엔씨	595,970	559,000	93.8%	‘12.11.27 ~‘15.04.01

별첨 : 1. 관련서류 1식(별도송부).  끝.

	도시철도설비부장
주무관	조영환		시설전기과장	서태창		도시철도설비부장	02/11 정찬웅
협조자
시행	도시철도설비부-1443	(		)	접수		(		)
우	100-731	서울 중구 서소문로 89 순화빌딩 12층 도시철도설비부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화		/전송	772-7308	/		/	대시민공개