문서번호	도로보수과-1441
결재일자	2015.2.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	강서도로사업소장
김동민		김권일	02/11 조병준
협조

제4회 설계변경(정산) 검토 보고

[2014년 노면표시 유지보수 공사]

2015. 2

강서도로사업소

도로보수과

설계변경(정산) 검토 보고

“교통안전시설(노면표시) 유지보수공사”에 대하여 당초 계약물량과 작업 지시에 의한 작업완료 물량이 상이하여 설계변경후 정산처리하고자 보고 드림

공사개요

○ 공 사 명 : 2014년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)-강서

○ 공사기간 : 2014. 04. 11. ~ 2015. 02. 28.

○ 공사개요 : 차선도색 166,095m, 차선제거 9,053m, 표지병설치 106개 등

○ 공사금액 : 569,452,310원

- 도급비 : 317,504,000원

- 관급비 : 251,948,310원

○ 도 급 자 : 해성실업(주) 이범용

관련근거

○ 제1차 ~ 제10차 작업완료 보고서 : ㈜영호이엔씨(공사 감리)

설계변경 사유

○ 노면표시 (재)도색에 대한 당초계약 물량과 작업완료 물량 반영

- 제1차 ~ 제10차 작업완료보고서 : (주)영호이엔씨

주요 변경 내역

○ 수량변경 내역

공 종	규 격	단위	계약물량	변경물량	비 고
융착식(수동식)	백색,실선,15㎝	m	1,809	1,910	증) 101
융착식(수동식)	백색,파선,15㎝	m	1,528	1,516	감) 12
융착식(수동식)	황색,실선,15㎝	m	2,890	2,829	감) 61
융착식(수동식)	백색,문자기호,15㎝	m	154	154	-
융착식(수동식)	백색,횡단보도,15㎝	m	7,246	7,280	증) 34

공 종	규 격	단위	계약물량	변경물량	비 고
융착식(수동식) 재도색	백색,실선,15㎝	m	11,200	11,970	증) 770
융착식(수동식) 재도색	백색,파선,15㎝	m	18,300	18,452	증) 152
융착식(수동식) 재도색	황색,실선,15㎝	m	20,470	20,324	감) 146
융착식(수동식) 재도색	청색,실선,15㎝	m	1,125	1,125	-
융착식(수동식) 재도색	청색,파선,15㎝	m	1,935	1,935	-
융착식(수동식) 재도색	백색,문자기호,15㎝	m	28,718	28,718	-
융착식(수동식) 재도색	백색,횡단보도,15㎝	m	56,513	56,482	감) 31
차선제거	제거,15㎝	m	9,053	9,043	감) 10
융착식(수동식)사급	황색,실선,15㎝	m	468	462	감) 6
융착식(수동식)사급	황색,파선,15㎝	m	12	12	-
융착식(수동식) 재도색 사급	황색,실선,15㎝	m	3,136	3,136	-
융착식(수동식) 재도색 사급	황색,파선,15㎝	m	6,965	6,971	증) 6
도로표지병(일반)설치, 단면	130*110*30	개	86	71	감) 15
도로표지병(일반)설치, 양면	130*110*30	개	20	20	-
도로표지병(AL몸체) 철거	철거	개	188	193	증) 5

설계 변경 내역

(단위 : 원)

구 분		금 액		비 고(증·감)
		당 초	변 경
총 공 사 비		569,452,310	569,452,310	-
도급비	공 급 가 액	288,640,000	288,640,000	-
	부가가치세	28,864,000	28,864,000	-
	계	317,504,000	317,504,000	-
관급자재비		251,948,310	251,948,310	-

조치의견

○ 상기와 같이 물량변경에 따른 설계변경(정산)을 시행하고자 합니다.

따로붙임 : 1. 설계변경 내역서 1부.

2. 제비율검증 결과 1부. 끝.