문서번호	시설관리과-405
결재일자	2015.2.11.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	시설부장
이나영		박희철	02/11 차광재
협조	총무과장		최대봉
	주무관		유충현

공사 설계변경 시행보고 (준공)

한강 자전거도로 유지보수공사(연간단가) -

2015. 2

한강사업본부

(시설관리과)

설계변경 시행보고(준공)

시행중인 한강공원 자전거도로 유지보수공사(연간단가)에 대하여 현장 여건 등에 따른 계약물량 및 도급금액이 변경되어 이에 대한 검토 보고 사항임

공사개요

❍ 공사위치 : 한강공원내 전지역

❍ 공사규모

- 아스팔트 포장 14a, 차선도색 12,000m

- 교통표지판 108개, 경계석 설치 738m

- 잠실선착장앞 올림픽대로 진입로 개선 270m

❍ 공 사 비 : 534,261천원 (도급비 345,261천원)

❍ 공사기간 : 2014.5.20. ~ 2015.2.17

❍ 시 공 사 : ㈜남경산업개발  이원근

보고내용

□  자전거도로 유지보수 : 단순 시공물량 증감

□ 잠실선착장 앞 올림픽대로 진입로 개선

❍ 차량정차대 축소

- 차량정차대를 당초 65m로 계획하였으나, 이용차량이 적고 녹지관리과 협의결과 최소한의 수목이식이 되도록 정차대구간 축소(65m→33m)

❍ 점토블럭 포장

- 광장내 자전거도로 신설시(폭4m, 연장84m) 기존 점토블럭과의 평탄성이 불량하여 일정구간 재포장 필요(A=12a)

❍ 안전시설 설치

- 잠실운동장 배후지 방향 진출경사로 옹벽부에 차량충돌방지 시설 설치 필요

- 폐쇄된 자전거도로 입구에 자전거 진입 방지 U형 볼라드 설치 필요

- 기타 단순 수량 변경

□ 주요공종별 설계변경

❍ 변경사항

공 종	단 위	물 량				금액(천원)
		당 초	변 경	증감
잔토운반	㎥	632	516	감	116	-2,712
차선도색	m	12,000	13,274	증	1,274	2,868
도로표지병 설치	개	-	58	증	58	1,010
잠실선착장 앞 진입로개선
토공	㎥	218	148	감	70	-1,894
아스팔트 포장(평삭)	a	40	35.7	감	4.3	-1,175
자전거도로 포장	a	5	4	감	1	-2,107
점토블럭포장	a	-	12	증	12	5,746
충격방지시설	식	-	1	증	1	6,393
U형 볼라드	개	-	9	증	9	3,751
수목이설	주	165	79	감	86	-7,615

설계변경 내역

❍ 설계변경(최종)

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 , 감
총 공 사 비	534,261,000	506,975070	-27,285,930
도 급 비	345,261,000	305,260,000	-9,475,000
관 급 비	189,000,000	171,189,070	-17,810,930

조치의견

❍ 상기와 같은 내용으로 설계변경 정산 처리코자 합니다.

첨   부 : 변경내역서 1부. 끝.