문서번호	급수운영과-2336
결재일자	2015.2.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		급수운영과장		강남수도사업소장
제영도		최임봉		02/11 정경효
협 조
	시설관리과장				송근호
	주무관				공문수
	주무관				송종학

2015년 상수도공사 발주계획

2015년  2월

강남수도사업소

(급수운영과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

2015년도 상수도공사 발주계획

우리사업소에서 시행예정인 2015년 배수관, 배급수관 정비사업 및 장기계속 단가계약 공사에 대하여 세부시행계획을 수립하여 공사시행에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ	‘15년 발주 대상 사업 현황

□  발주 대상

구분	계	배수관	배급수관	급수공사	시설물공사	누수복구	포장복구	폐기물처리
건수	17	3	3	4	2	1	1	3

□ 단위사업 : 6건(배수관, 배급수관)

□ 단가계약 : 11건(급수공사, 시설물정비, 누수복구, 포장복구, 폐기물처리)

Ⅱ	단위사업 추진계획

□  배수관 정비사업

□ 정비대상 : 2.9km

□ 추진방법 : 단위사업으로 발주 시행

□ 추진계획

공 사 명	공사개요	사업비 (백만원)	공사기간	발주예정	담당자	비고
계	D=300~600㎜, L=2,930m	3,700
대치동 미도아파트간외 1개소 배수관 정비공사	D=400~500㎜, L=620m	900	2015.3.~2015.10	2015.3	이보민
한남I.C ~ 논현역간 배수관 정비공사	D=500~600㎜, L=910m	1,500	2015.3~2015.12	2015.3	이정훈
우면동~서울대공원간 배수관 정비공사	D=300㎜, L=1,400m	1,300	2015.3.~2015.12	2015.3	송종학

□  배급수관 정비사업

□ 정비대상 : 4.1km

□ 추진방법 : 단위사업으로 발주 시행

□ 추진계획

공 사 명	공사개요	사업비 (백만원)	공사기간	발주예정	담당자	비고
계	D=80~300㎜, L=4,120m	3,340
청담동 2번지외 2개소 배급수관 정비공사	D=200~300㎜, L=1,350m	1,100	2015.3.~2015.12	2015.3	차승현
방배동 813-5~909-6간 배급수관 정비공사	D=300㎜, L=1,360m	1,100	2015.3~2015.12	2015.3	이영동
방배동 446-16~489-2외 1개소 배급수관 정비공사	D=300㎜, L=1,410m	1,140	2015.3.~2015.12	2015.3	안규태

□  단위사업 세부 추진계획

□ 공사시행 순서

현장 조사	⇒	자체 설계	⇒	설계 심사	⇒	공사 발주	⇒	착공	⇒	설계 변경	⇒	준공

□ 분야별 세부시행 계획

구 분	세부 일정 내용	비 고
계획심사 (도면심사)	‘15.1.27 : 배급수관 도면심사(본부 누수방지과) ‘15.2.05 : 배수관 도면심사(본부 배수과)
설 계	‘15.1 : 공사별 현장조사 ‘15.2 : 상수도공사 일위대가 작성(본부 재무회계과) ‘15.2 : 도로굴착 사업계획 심의(구청) ‘15.2 : 도로굴착 요청서 제출(구청) ‘15.2 : 설계완료
설계심사	- ‘15.2 : 사전 설계심사 실시(사업소 자체) - ‘15.2 : 설계심사 요청(본청 및 본부)
공사발주	‘15.3 : 설계심사 완료건 순으로 발주
착 공	‘15.4 : 공사계약 및 착공 ‘15.4 : 공사설명회 개최(현장 관계자) ‘15.4~12 : 공사기간중 현장점검 실시(2회)
예 비 준공검사	공사별 준공 한달~15일전 시행 체크리트에 의한 현장 점검
설계변경	공사별 준공 15일 전 시행 설계변경 심사 실시(사업소 및 본부)
준 공	공사 준공전 현장점검 실시(체크리스트 활용) 공사완료된 공사건별 시행

Ⅲ	장기계속 단가계약공사 추진계획

□  계약 방법

※ 관련근거 : 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제21조(장기계속계약)

□ 단가계약의 장기계속계약시행 방법

- 총 예정물량은 장기계속계약 절차에 따라 2016년 준공시까지의 전체물량으로하되, 2015년도 12월31일까지의 예정물량과 2016년도 준공시까지의 예정물량을 합산 산출하고 각 연도별 총 소요예산을 명확히 구분하여 발주

□ 2016년도 1월부터 준공시까지 집행할 2차년도 예정량에 대하여는 익년도 예산을 확보한 후 2016년 1월중에 국가를 당사자로 하는 계약에 관한법률 시행령 제 67조(회개년도 개시전의 계약)에 의거 계약요구

□  계약 기간

□ 2015년도 계약기간(1차수) : 계약일로부터 2015.12.31일까지

□ 2016년도 계약기간(2차수) : 2016.1.1. ~ 준공일까지

□  장기계속 단가계약공사 발주예정 현황

구 분	공 사 명	공사기간	공사개요	총공사비 (백만원)	발주예정 (월)	비고
급수공사	개포1동외 14개동 상수도공사	2015.7.1. ~2016.6.30	D=13~300mm, L=2,550m	1,200	2015.5	이보민
	신사동외 6개동 상수도공사	2015.5.1. ~2016.6.30	D=13~300mm, L=2,340m	1,100	2015.3	차승현
	반포1동외 10개동 상수도공사	2015.7.1. ~2016.6.30	D=13~300mm, L=1,200m	650	2015.5	이영동
	서초1동외 10개동 상수도공사	2015.7.1. ~2016.6.30	D=13~300mm, L=1,800m	900	2015.5	안규태
누수복구	서초,강남구관내 상수도 긴급누수복구공사	2015.7.1. ~2016.6.30	누수복구:1200개소 불용관정비:400개소	1,950	2015.5	강희창
시 설 물 정 비	강남구관내 상수도시설물 설치 및 보수공사	2015.5.1. ~2016.4.30	상수도 시설물 정비 : 235개소	1,300	2015.3	이승우
	서초구관내 상수도시설물 설치 및 보수공사	2015.5.1. ~2016.4.30	상수도 시설물 정비 : 258개소	1,300	2015.3	최덕환

구 분	공 사 명	공사기간	공사개요	총공사비 (백만원)	발주예정 (월)	비고
포장복구	강남,서초구관내 포장도로 굴착복구공사	2015.5.1. ~2016.4.30	도로복구:130a	1,200	2015.3	이정훈
폐 기 물 처 리	강남구관내 건설폐기물 처리용역	2015.5.1. ~2016.4.30	운반 : 1200㎥ 처리 : 2820톤	100	2015.3	이보민
	서초구관내 급수공사 및 누수 복구공사 건설폐기물처리용역	2015.7.1. ~2016.6.30	운반 : 2558㎥ 처리 : 5646톤	170	2015.5	강희창
	서초구관내 배수관정비 등 건설폐기물처리용역	2015.5.1. ~2016.4.30	운반 : 1220㎥ 처리 : 2850톤	120	2015.3	안규태

Ⅳ	상수도공사 일위대가 작성을 위한 운반거리 적용

□  적용 목적

□ 우리수도사업소에서 시행하는 상수도공사(단위사업, 단가계약)의 원활한 추진을 위하여 2015년도 기본품셈 단가표(일위대가)의 운반거리 적용기준을 산정하여 조기발주 업무 수행에 만전을 기하기 위함

※ 관련근거 : 본부 재무회계과-1417(2015.2.5.)

□  적용대상 공사

□ 단위사업 : 배수관, 배급수관 정비공사

□ 단가계약 : 급수공사, 시설물공사, 누수복구공사, 포장복구공사

□  주요내용

□ 환토재(골재) : 현장도착도를 적용하므로 별도의 운반거리 산정 불필요(필요시 별도산정)

□ 잔토처리 : 각종 상수도공사에서 발생되는 잔토는 김포매립지로 반입하고, 김포매립지까지 운반거리의 산정은 별첨 “운반거리 산정”과 같으며, 속도는 서울시 도시교통본부에서 발표한 “서울시 가로별 속도조사”표의 가로별 속도를 적용

□ 자재운반비 : 수도자재관리센터 “노량진 적치장”으로 설계되었으며, 운반거리 산정은 별첨 “운반거리 산정”과 같으며, 속도 산정은 “서울시 가로별 속도조사”표의 가로별 속도를 적용

□  운반거리 세부 적용사항

□ 잔토처리

- 강남구(총운반거리 : 52.0㎞)

현장 (집하장)	L=5.9	성수대교 남단	L=25.0	개화 I․C (행주대교남단)	L=15.1	수도권매립지	L=6.0	매립지
	V=31.1		V=59.6		V=51.0	입 구	V=20
	언주로		올림픽대로		매립지 전용도로		매립지내

- 서초구(총운반거리 : 44.8㎞)

현장 (집하장)	L=4.0	반포대교 남단	L=19.7	개화 I․C (행주대교남단)	L=15.1	수도권매립지	L=6.0	매립지
	V=27.5		V=59.6		V=51.0	입 구	V=20
	반포대로		올림픽대로		매립지 전용도로		매립지내

□ 자재운반비

- 강남구(총운반거리 : 16.4㎞)

수도자재 관리센터 (노량진)	L=1.0	노량진 P턴	L=9.5	성수대교 남단	L=5.9	현장 (집하장)
	V=25.0		V=59.6		V=31.1
	이면도로		올림픽대로		언주로

- 서초구(총운반거리 : 11.3㎞)

수도자재 관리센터 (노량진)	L=1.0	노량진 P턴	L=5.2	반포대교 남단	L=2.1	서초역	L=3.0	현장
	V=25.0		V=59.6		V=27.5		V=20.0
	이면도로		올림픽대로		반포대로		이면도로

※ 계약 후 잔토처리장의 변동사유 발생시 공사여건에 따라 방침 후 시행

붙임 : 1. 상수도공사 설계 일반 지침서 1부.

2. 운반거리 조정(강남구, 서초구) 각1부.

3. 가로별 속도 조사표 1부.

4. 상수도공사 특별 시방서(개선) 1부.  끝.