투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	곰사 뒷방사장 보수공사 설계변경 계약의뢰

1. 시설과-928호(2015.2.11)와 관련입니다

2. 곰사 뒷방사장 보수공사와 관련하여 아래와 같이 정산설계변경 코자 하니 처리하여 주시기 바랍니다

가. 공 사 명 : 곰사 뒷방사장 보수공사

나. 공사금액 : 금435,628,000원

다. 공사기간 : 2014.9.11 ~ 2015.2.12

라. 계 약 자 : ㈜미래이앤씨 대표 이용오

마. 설계변경 내역

(단위 : 원)

변 경 전	변 경 후	비 고
435,628,000	435,628,000	변경없음

바. 설계변경 사유 : 노후시설 보수에 따른 공사물량 증감 발생 및 보험료 등 제겨비 정산

붙임 : 1. 곰사 뒷방사장 보수공사 설계변경(정산) 검토보고서 1부.

2. 변경설계서 1부.

3. 합의각서 1부. 끝.

	서울대공원장
주무관	김용주		추진반장	02/11 유인행
협조자
시행	시설과-936	(		)	접수		(		)
우	427-702	경기 과천시 대공원광장로 102(막계동159-1) 서울대공원	/	http://grandpark.seoul.go.kr
전화	02) 500-7054	/전송	02-507-7230	/		/	대시민공개