문서번호	시설과-928
결재일자	2015.2.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		추진반장	관리부장
김용주		유인행	02/11 심상원
협조
	동물복지과장		이달주

곰사 뒷방사장 보수공사

설계변경(정산) 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 2

서  울  대  공  원

(기반시설안전추진반)

곰사 뒷방사장 보수공사

설계변경(정산) 검토보고

곰사 뒷방사장 보수공사 시행중 일부 공종 물량 증감 및 보험료 등 제경비 정산에 따른 설계변경(정산)을 시행 하고자 함

Ⅰ		공 사 개 요

□ 공 사 명 : 곰사 뒷방사장 보수공사

□ 공사기간 : 2014. 9. 11 ~ 2015. 2. 12

□ 계 약 자 : ㈜미래이앤씨 대표 이용호

□ 공사금액 : 일금435,628,000원정

□ 주요공사내용

○ 외부 오수배수로 정비 78m

○ 옥상방수 540.8㎡

○ 내·외벽 도장 2,065㎡

○ 외부방사장 바닥정비

○ 철재우리 증축 42.3㎡

○ 외부 철재우리 방청도장

○ 내·외부 방사장 출입문 잠금장치 보완 등

Ⅱ		공사비 변경

□ 변경금액

(단위 : 원)

변 경 전	변 경 후	비 고
435,628,000	435,628,000	변경없음

□ 주요 변경내용

(단위 : 천원)

연번	공 종	공사비	비 고
1	창고 출입문 3개소 노후로 교체 필요하며 옥상 우수배수로 연장시공	증8,191	예비준공검사 결과 보완사항
2	출입문 2중잠금장치 12개소 보완시공	증4,058	사육사 의견을 반영하여 출입문 2중잠금장치 개선
3	곰사2 외부철재우리 철판보강	증3,304	외부 철재우리가 부식으로 단면이 손상되어 철판보강 필요
4	옥상 신축줄눈 설치 등 물량 증감 발생	감3,928	물량 증감발생분 정산
5	건강보험료 등 제경비 정산	감11,625	실비정산
	합 계	변경없음

Ⅲ		변경 검토

1. 창고 출입문 3개소 교체 및 옥상 우수배수로 연장시공

○ 현 황

- 창고 목재출입문 3개소가 곰사바닥 물청소시 물과 접촉되어 노후화진행으로 하단부 일부 파손 및 부패로 기능 저하됨

- 옥상 우수가 곰사우리로 침입될 우려있음

○ 검토의견(증8,191천원)

- 노후로 파손된 출입문을 물에 강한 스테인레스로 교체시공하고자 하며

- 옥상 홈통을 연장시공하여 우수 침입을 예방

⚫ 공사개요 : 출입문 교체 3개소,

홈통연장 D=200㎜, L=4.3m (2개소)

2. 출입문 2중잠금장치 12개소 보완

○ 현 황

- 곰사 2중잠금장치 시공중 사육사가 2중잠금장치에 와이어 줄을 연결하여 안전하고 사용하기 편리하도록 개선요구

○ 검토의견(증4,058천원)

- 시설물 개선요구에 대한 의견을 반영, 출입문의 시건장치 보완조치

⚫ 공사개요 : 출입문 2중 잠금장치 12개소

3. 곰사2 외부 철재우리 철판보강

○ 현 황

- 철재우리가 부식이 되어 철판에 구멍이 발생하는 등 단면손상이 발생함

○ 검토의견(증3,304천원)

- 단면 손상이 발생한 철재우리(8개소)에 철판보강 조치

4. 옥상 신축줄눈 설치 등 물량 증감발생

○ 현 황

- 옥상 신축줄눈 설치 등 기타 물량 증·감발생

○ 검토의견(감3,928천원)

- 물량 증·감분에 대한 정산하고자 함

5. 건강보험료 등 제경비 정산

○ 현 황

- 건강·연금·노인장기요양보험료, 산업안전보건관리비등에 대하여 실비정산 결과 차액이 발생함

○ 검토의견(감11,625천원)

- 각종 보험 및 안전관리비 등에 대하여 실비정산토록 규정되어 있어  설계변경 정산에 반영 조치

Ⅳ		조 치 의 견

□ 본 공사건에 대하여는 상기 검토의견과 같이 설계변경(정산)시행 하고자 합니다.

붙임 : 1) 변경설계서 1부.

2) 변경 설계도면 1부. 끝.