	동부도로사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경(정산)시행［(도로.교통안전부속물 유지보수공사(연간단가)］

1. 우리사업소에서 시행중인『도로.교통안전부속물 유지보수공사(연간단가)』에 대하여 아래와 같이 설계변경(정산)을 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 도로.교통안전부속물 유지보수공사(연간단가)

나. 공사기간 : 2014. 3. 21 ~ 2015. 02. 28.

다. 공사개요

o 시선유도봉 설치 530개, 도로표지병 설치 15,544개

중앙분리대 설치 21경간,

라. 도 급 비 : 297,532,000원

마. 도 급 자 : 디앤아이건설(주) 대표 이동원

바. 설계변경내역

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증 · 감	비 고
총 공 사 비		374,612,300	349,326,000	감)25,286,300
도급비	공급가액	270,483,637	270,310,000	감) 173,637
	부가가치세	27,048,363	27,031,000	감) 17,363
	계	297,532,000	297,341,000	감) 191,000
관 급 비		48,391,450	48,131,000	감) 260,450
이 설 비		28,688,850	3,854,000	감)24,834,850

사. 변경 사유 : 도로부속물 및 교통안전부속물 공종별 수량 증ㆍ감

- 관급자재 정산 및 이설비 정산

아. 예산 과목

- 도시안전실(도로관리과), 도로시설물관리, 도로및도로부속물관리, 도로부속시설물일상유지관리

- 도시교통본부(교통운영과), 도시교통체계및소통개선, 교통안전시설물관리, 도로부속교통안전시설물설치, 시설비

- 도시교통본부(교통운영과), 도시교통체계및소통개선, 교통소통및안전관리강화, 도로교통소통개선사업, 시설비

- 도시교통본부(교통운영과), 도시교통체계및소통개선, 도시고속도로소통강화, 도시고속도로기능개선

따로붙임 : 1. 설계변경 사유서 1부.

2. 설계변경 검토보고서 1부.

3. 설계변경 내역서 1부.   끝.

주무관	송광석		도로보수과장	김환겸		동부도로사업소장	02/12 송상영
협조자	주무관	박일연		주무관	이중연		계약1팀장	김점선
시행	도로보수과-946	(		)	접수		(		)
우	135-280	서울 강남구 남부순환로 3142-33(대치동 2번지)	/	http://www.seoul.go.kr
전화		/전송		/		/	대시민공개