문서번호	토목부-3019
결재일자	2015.2.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
김구		홍숭희	02/12 노우성
협조
	주무관		유근평

설계변경(8차 2회)검토 보고

【강남순환도시고속도로(8공구) 건설공사】

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 2.

도시기반시설본부

토목부

설계변경(8차 2회)검토 보고

【강남순환도시고속도로(8공구) 건설공사】

『강남순환도시고속도로(8공구)건설공사』에 대한 시공물량 변경 등에 따른 8차(2회) 계약분 설계변경 검토보고 드림.

관련근거

❍ 동기공 2015-471호(`15.2.10.) 설계변경(8차 2회) 검토 보고

공사개요

❍ 공 사 명 : 강남순환도시고속도로(8공구) 건설공사

❍ 공사규모 : 폭 4~10차로, 연장 7.96km(교량 2개소, 지하차도 4개소)

❍ 공 사 비 : 222,995백만원 (8차: 4,000,000천원)

❍ 공사기간 : 2002. 7. 3. ~ 2018. 7. 31.(8차 `14.10.1.~`15.2.28.)

❍ 시 공 사 : 롯데건설(주) 외 1

❍ 감 리 사 : ㈜동명기술공단

설계변경 내용

❍ 공사금액 및 공사기간

(단위 : 천원)

구 분		공사금액	증･감	공 사 기 간	비고
8차(2회)	당초	4,000,000		2014.10.01.~2015.02.28.
	변경	4,000,000	변경없음	2014.10.01.~2015.02.28.

❍ 공사비 변경(증･감) 현황

(단위 : 백만원)

구 분	8차(2회)			비고
	당초	변경	증･감
1. 토공	-	-	-
2. 배수공	-	-	-
3. 구조물공	2,804	2,922	118
4. 포장공	-	-	-
5. 기계설비공	17	17	-
6. 조경공	162	162	-
7. 시상수도이설공	-	-	-
8. 부대공	62	-	-62
9. 교통시설물설치공	-	-	-
직접공사비	3,045	3,101	56
제 경 비	591	535	-56
공급가액	3,636	3,636	-
부가가치세	364	364	-
도 급 액	4,000	4,000	-

❍ 설계변경 사유

- 8차분 공사(`14.10.1. ~ `15.2.28.) 실제 시공물량 정산

❍ 감리검토 의견

- 8차분 공사에 대한 실 시공물량 정산하여 도급비 변경 없음.

- 공사계약 일반조건 제19조 및 20조에 의거 계약금액 조정은 적정하다고 사료됨.

조치계획

❍ 상기 감리단 검토보고와 같이 8차분(2회, 계약금액 변경없이 물량만 조정)에 대해 설계변경 추진하여 공정관리에 만전을 기하고자 함.

【붙 임】 1. 감리검토의견서 1부.

2. 설계변경내역서(8차 2회) 1부.  끝.