문서번호	도로보수과-963
결재일자	2015.2.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	도로보수과장	동부도로사업소장
이민호	박일연	김환겸	02/12 송상영
협 조

2014년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사 설계변경(최종) 검토보고

2015. 2

동 부 도 로 사 업 소

도 로 보 수 과

2014년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사

설계변경(최종) 검토 보고

우리사업소에서 시행중인 『2014년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사』와 관련하여 감리사인 ㈜영호이앤씨로부터 제출된 설계변경 요청에 대한 검토보고 임

1		관 련 근 거

□ ㈜영호본2014-244호(2015.2.10)

☞ 2014년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사 2차 설계변경 요청

2		공 사 개 요

□ 공 사 명 : 2014년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사

□ 공사개요 : 노면표시 설치 L=257,779m, 제거10,004m

□ 공사기간 : 2014. 4. 4 ~ 2014. 2. 28

□ 도 급 비 : 469,892천원

□ 도 급 자 : 초승안전(주)  대표 김 수 웅

3		보 고 내 용

□ 작업지시한 설계물량과 실제 작업물량에 대한 시공물량 증감으로        인한 계약물량 조정

□ 제경비 정산에 따른 계약금액 조정

□ 공사물량 주요 증･감 내역(노면표시 도색)

연번	구 분	당 초(m)	변 경(m)	증, 감(m)	비 고
1	백색(융착식)	16,625	15,775	감) 850
2	황색(융착식)	15,024	15,042	증) 18
3	청색(융착식)	581	594	증) 13
4	문자기호(융착식)	10,665	10,712	증) 47
5	횡단보도(융착식)	14,796	15,831	증) 1,035
6	백색(융착식) 재도색	50,559	50,250	감) 309
7	황색(융착식) 재도색	43,262	43,262	-
8	청색(융착식) 재도색	3,002	3,002	-
9	문자기호(융착식) 재도색	39,361	39,370	증) 9
10	횡단보도(융착식) 재도색	63,904	63,592	증) 48
11	차선제거	10,004	10,723	증) 719

4		공사비 변경 현황

□ 공사비 변경 현황                                     (단위:원)

구 분		변 경 내 역			비 고
		당 초	변 경	증, 감
총 공 사 비		834,805,000	818,871,000	감) 15,934,000
구분	도 급 비	469,892,000	453,958,000	감) 15,934,000
	관 급 비	364,913,000	364,913,000	-

5		조 치 계 획

□ 위와 같은 사항에 대하여 감리사가 제출한 설계변경 검토의견이         적정하다고 판단되므로 재계약 처리코자 함.

붙임 : 설계변경내역서 1부.  끝.