문서번호	기전과-1445
결재일자	2015.2.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	북부도로사업소장
박정민		이영목	02/12 이승진
협 조
	주무관			백윤광

『2014년 교통신호기 신설 및 보수공사(2구역)』

조치계획보고

2015. 2.

북부도로사업소

(기 전 과)

『2014년 교통신호기 신설 및 보수공사(2구역)』

조치계획보고

우리 사업소에서 시행중인 『2014년 교통신호기 신설 및 보수공사(2구역)』에 대해 책임감리사로부터 설계변경(정산) 서류가 접수되어 아래와 같이 조치계획을 보고함

▢ 관련근거

❍ 2015. 2. 11. 감리사 설계변경(3차) 서류 제출

▢ 사업개요

❍ 공 사 명 : 2014년 교통신호기 신설 및 보수공사(2구역)

❍ 공사기간 : 2014. 4. 11. ~ 2015. 2. 28.

❍ 시공업체 : (주)세진종합이엔씨 대표 이 성 임

❍ 계약금액 : 금696,608,000원

▢ 설계변경 추진내용

❍ 설계변경 금액                                          (단위 : 원)

구 분		공사금액		증ㆍ감	비 고
		당 초	변 경
도급비	공사원가	633,280,000	632,900,000	- 380,000	‣공사금액 : 418,000(감)
	부가가치세	63,328,000	63,290,000	- 38,000
	계	696,608,000	696,190,000	- 418,000

❍ 예산과목 : 도시교통본부, 도시교통체계및소통개선, 교통안전시설물관리, 교통신호기신설및보수, 시설비

❍ 설계변경 사유

- 물량 변경에 따른 공사물량 증감 반영.

-  전기안전검사수수료, 폐기물처리비, 산업안전보건관리비 등 정산.

▢ 조치사항

❍ 책임감리사로부터 접수된 설계변경(정산)내역에 대해 검토한 결과 타당하여 설계변경(정산)코자 함.

붙임 : 1. 설계변경 서류 제출(감리사) 1부.

2. 설계변경내역서 1부.

3. 제비율검증서 1부.  끝.