투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(보조감리원(기계) 투입기간 조정 요청에 대한 승인 알림)

1.업무지시현장 :  선사로~고덕지구간 도로확장공사 (주)한국건설관리공사, 선사로~고덕지구간 도로확장공사 주식회사 대저건설

2.작 성 일 자 : 2015-02-12 00:02:00

3.지 시 내 용

가.  선사고덕0420-77(2015. 2.11.)호와 관련임.

나. “선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사외 1개소 통합전면책임감리용역”수행과 관련하여 오수중계펌프장 이설 및 상수도관(D=700㎜) 이설 감리감독 업무 수행을 위해 기간조정 승인요청 사항에 대하여 아래와 같이 승인하오니 감리업무 수행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

- 아  래

담당업무	성 명	투입기간		비고
		당 초	조 정(안)
펌프장이설 및 상수도관 이설 용접감리(기계분야)	김 시 찬 (감리사보)	‘14.11.20. ~ ‘15.2.20. (3개월)	‘14.11.20.~ ‘15.6.20. (7개월)	전체감리비 증액 없음

.  끝.

※ 본 결재는 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는  문서로, 결재 완료 시 One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송 처리 됩니다.

주무관							이한규			광역도로과장					02/12 진재섭
협조자
시행			토목부-2894									(						)		접수											(						)
우	100-777					서울 중구 무교동 96(청계천로 8) 프리미어플레이스 빌딩 12층															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		02-3708-2556						/전송			02-3708-2599					/													/	대시민공개