내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	용역계약기간 연장 의뢰(2014년 도로교통 안전개선사업 교통신호기공사 감리용역)

1. 교통운영과-1961(2015.2.2)호와 관련입니다.

2. 2014년 도로교통 안전개선사업 교통신호등공사 감리용역의 계약기간 연장을 아래와 같이 의뢰합니다.

가. 계약현황

용역명	계약번호	계약자	계약금액	계약기간	비고
2014년 도로교통 안전개선사업 교통신호기공사 감리용역	20140906945	도로교통공단 서울특별시지부 대표 장광	금90,229,700원	2014.9.5 ~ 2015.2.28

나. 변경내용

변경내용	당초	변경	비고
계약기간 연장	2014.9.5. ~ 2015.2.28	2014.9.5. ~ 2015.6.30	계약금액 변경없음

다. 변경사유 : 당해 개선공사의 공기연장과 정확한 감리비 정산을 위하여                         준공기한 연기

3. 2014년도 사고이월 내역

연번	예산과목	사고이월액	비고
합 계		금89,410,700원	예산합계 금90,229,700원
1	교통소통 및 안전관리강화/도로교통 소통 개선/ 시설비및부대비/감리비(401-02)	금32,080,000원
2	교통소통 및 안전관리강화/교통사고 잦은 곳 개선/ 시설비및부대비/감리비(401-02)	금36,810,000원
3	교통안전시설물관리/보행불편해소를 위한 횡단보도 확충정비/ 시설비및감리비/감리비(401-02)	금20,520,700원
4	도시고속도로 소통 강화/도시고속도로 기능 개선/ 시설비및부대비/감리비(401-02)	금819,000원	2014.2.10. 부분준공신고서 제출

붙임  1. 준공기한 연기 의뢰서 및 합의각서 각1부.

2. 관련공문 1부.  끝.

	교통운영과장
주무관	박지웅		신호시설팀장	김균호		교통운영과장	전결 02/12 강진동
협조자	계약2팀장	홍연화
시행	교통운영과-2796	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동) 제1동 6층	/
전화	2133-2484	/전송	2133-1053	/	elecpass@seoul.go.kr	/	대시민공개