문서번호	방재시설부-2008
결재일자	2015.2.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
조양연		이도헌	02/13 임춘근
협조

설계변경(전체6회, 2차6회․3차2회) 검토 보고

- 송정사근 빗물펌프장 증설공사 -

2015. 2

도시기반시설본부

(방재시설부)

설계변경(전체6회, 2차6회․3차2회) 검토 보고

- 송정사근 빗물펌프장 증설공사 -

『송정사근 빗물펌프장 증설공사』에 대한 실정보고 승인 및 시공물량 정산에 의한 공사 설계변경 검토보고 임.

Ⅰ		관련근거

○ 공사감독2처-1278호(2015. 2. 10.) “설계변경도서 제출”

○ 소규모 공사감독 위수탁 협약서(2008.2.22)

- 설계변경의 시행 및 변경도서 작성은 시설관리공단이 시행

Ⅱ		공사개요

○ 위    치 : 성동구 송정동 81-5, 성동구 사근동 198-5

○ 규    모

- 송 정 : 펌프증설 Q=616톤(2대), 토출관로 확장(2련, D=2,600mm, L=70m)

- 사 근 : 펌프증설 Q=1,020톤(2대), 토출관로 신설(1련, D=2,800mm, L=36m)

○ 사업기간 : 2012.12.27 ～ 2015. 2. 28.

○ 총사업비 : 17,398백만원 [도급비 : 7,575백만원]

○ 감 리 사 : 서울시설관리공단 ○ 시 공 사 : 경동산업(주) 외1

Ⅲ		공단 보고 내용

○ 계약 금액 조정(전체분 6회)                       (단위 : 원)

구 분		전 체 분			비 고
		당 초	변 경	증 ․ 감
총 공사비		8,668,147,154	8,565,445,910	감)102,701,244
도급액	공급가액	6,886,189,000	6,808,990,000	감)77,199,000
	부 가 세	688,618,900	680,899,000	감)7,719,900
	계	7,574,807,900	7,489,889,000	감)84,918,900
관급자재비		896,968,354	869,080,170	감)27,888,184
폐기물처리비		196,370,900	196,200,400	감)170,500
이설비,수탁공사비		-	10,276,340	증)10,276,340

○ 계약 금액 조정(2차6회)                            (단위 : 원)

구 분		2 차 분			비 고
		당 초	변 경	증 ․ 감
총 공사비		4,985,860,400	4,900,941,500	감)84,918,900
도급액	공급가액	4,532,600,364	445,5401,364	감)77,199,000
	부 가 세	453,260,036	445,540,136	감) 7,719,900
	계	4,985,860,400	4,900,941,500	감)84,918,900

○ 계약 금액 조정(3차1회)                            (단위 : 원)

구 분		3 차 분			비 고
		당 초	변 경	증 ․ 감
총 공사비		744,647,500	744647,500	-
도급액	공급가액	676,952,272	676,952,272	-
	부 가 세	67,695,228	67,695,228	-
	계	744,647,500	744,647,500	-

○ 공사기간 변경없음.

구분	공 사 기 간		비고
	당초	변경
총차	2012.12.27.~2015.2.28.	변경없음
2차	2013. 3.29.~2015.2.28.	변경없음
3차	2013. 6.13.~2015.2.28.	변경없음

○ 공단 검토의견

- 전체 계약금액 조정현황은 공사 실정보고 및 시공물량 정산에 따른 설계 반영사항으로 적정한 것으로 판단됨.

Ⅴ		조 치 계 획

○ 상기와 같이 공단 설계변경 보고내용을 검토한바 적정 한 것으로 판단되므로 설계변경 시행하여 공사 준공코자 합니다.

붙임 : 1. 공단 설계변경 시행공문 1부.

2. 설계변경 내역서(전체6회, 2차6회, 3차1회) 1부.  끝.