문서번호	방재시설부-2007
결재일자	2015.2.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
조양연		이도헌	02/13 임춘근
협 조

설계변경(총차2회, 2차1회) 시행 검토보고

- 송정사근빗물펌프장 증설공사 건설폐기물 처리용역 -

2015. 2.

도시기반시설본부

(방재시설부)

설계변경(총차2회, 2차1회) 시행 검토보고

- 송정사근빗물펌프장 증설공사 건설폐기물 처리용역 -

송정사근빗물펌프장 공사 준공에 따른 현장내 발생폐기물의 증.감 물량 정산에 대해 설계변경 시행키 위한 검토보고임..

용역개요

○ 용 역 명 : 송정사근빗물펌프장 증설공사 건설계기물 처리용역

○ 규    모 : 건설폐기물 운반 및 처리 5,858톤

- 송정빗물펌프장 4,995톤(폐콘 2,825톤, 건설폐기물 2,143톤)

- 사근빗물펌프장 1,991톤(폐콘 1,225톤, 혼폐 510톤, 폐아스콘 193톤 건설폐기물 96톤)

○ 용역기간 : 2013. 3.15 ~ 2015. 2. 28

○ 도 급 액 : 196,370,900원(1차:138,069,330원, 2차:58,301,570원)

○ 도 급 사 : ㈜벽성그린산업 대표 황윤남외1

시설관리공단의견

○ 본 용역 감독업무수행중 발생폐기물 정산에 따른 물량 변경을 보고 함.

○ 설계 변경 현황

- 폐기물 수량변경 현황

구분		단위	수 량
			총 차			2 차
			당초	변경	증.(감)	당초	변경	증.(감)
송정	폐콘크리트	톤	2,852	3,342	490	987	1,477	490
	건설폐재류	톤	2,143	1,607	(536)	789	253	(536)
사근	폐콘크리트	톤	1,225	1,327	102	302	404	102
	폐아스콘	톤	193	239	46	55	101	46
	건설폐재류	톤	63	96	33	23	56	33
	혼합폐기물 (소각5%이하)	톤	510	510	-	-	-	-

- 총차 2회

구 분		용역비(단위 : 원)			비고
		당초	변경	증.(감)
총 용 역 비		196,370,900	196,200,400	감)170,500
용역비	공급가액	178,519,000	178,364,000	감)155,000
	부가세	17,851,900	17,836,400	감)15,500
	계	196,370,900	196,200,400	감)170,500

- 2차 1회

구 분		용역비(단위 : 원)			비고
		당초	변경	증.(감)
총 용 역 비		58,301,570	58,131,070	감)170,500
용역비	공급가액	53,001,427	52,846,427	감)155,000
	부가세	5,300,143	5,284,643	감)15,500
	계	58,301,570	58,131,070	감)170,500

보고자 의견

○ 공사 준공에 따른 발생 증․감 폐기물량을 정산하여 설계에 반영하는 건으로 위탁 감독의 검토결과 설계변경 내역이 적합하다고 판단하였고 이를 검토한 결과 특이사항이 없으므로 설계변경을 시행하고자 함.

붙임 : 1. 위탁감독보고서 1부.

2. 설계변경내역 (총차2회, 2차1회) 내역서 각 1부.  끝.