투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2014년 차집관로시설물유지보수공사(연간단가) 설계변경 시행(최종)

우리 센터에서 시행중인 『2014년 차집관로시설물유지보수공사(연간단가)』에 대하여 아래와 같이 설계변경 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 2014년 차집관로시설물유지보수공사(연간단가)

나. 도 급 자 : 홍익산업개발(주) 대표 정연용

다. 공사개요 : 비굴착 보수 509m

라. 공사기간 : 2014. 5. 8 ~ 2015. 02. 27.

마. 변경내역

구 분		당초 계약금액	변경 계약금액	증 ․ 감
총공사비		852,290,520	820,270,520	감)32,020,000
도급비	공급가액	711,672,728	682,563,637	감)29,109,091
	부가가치세	71,167,272	68,256,363	감)2,910,909
	계	782,840,000	750,820,000	감)32,020,000
관급자재비		69,450,520	69,450,520	-
이전비		-	-	-

바. 변경사유 : 계약물량 증감 및 신규공종

사. 예산과목 : 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재생센터 운영관리, 공통분야유지보수

시설비 및 부대비, 시설비(차집관거준설및유지관리)

붙   임 :  변경설계서 1부.  끝.

주무관	차성민		물재생과장	강병수		중랑물재생센터소장	02/13 김동기
협조자	주무관	최승룡		관리과장	김홍덕
시행	물재생과-1013	(		)	접수		(		)
우	133-837	서울 성동구 자동차시장3길 64 중랑물재생센터 물재생과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2555	/전송	02-2211-2579	/	csm0528@seoul.go.kr	/	대시민공개