투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	설계변경 계약의뢰(송정사근 빗물펌프장 증설공사)

1. 우리본부에서 시행중인 「송정사근 빗물펌프장 증설공사」에 대한 설계변경을 아래와 같이 시행코자 계약의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 송정사근 빗물펌프장 증설공사

나. 도 급 비 : 7,574,807,900원

다. 공사기간 : 2012. 12. 27  ~ 2015. 2. 28.

라. 도 급 자 : 경동산업(주)외 1

마. 설계 변경 내역

1) 전체 6회                                           (단위 : 원)

구 분		전 체 분			비 고
		당 초	변 경	증 ․ 감
총 공사비		8,668,147,154	8,565,445,910	감)102701244
도급액	공급가액	6,886,189,000	6,808,990,000	감)77,199,000
	부 가 세	688,618,900	680,899,000	감)7,719,900
	계	7,574,807,900	7,489,889,000	감)84,918,900
관급자재비		896,968,354	869,080,170	감)27,888,184
폐기물처리비		196,370,900	196,200,400	감)170,500
이설비,수탁공사비		-	10,276,340	증)10,276,340

2) 2차 6회                                         (단위 : 원)

구 분		2 차 분			비 고
		당 초	변 경	증 ․ 감
총 공사비		4,985,860,400	4,900,941,500	감)84,918,900
도급액	공급가액	4,532,600,364	445,5401,364	감)77,199,000
	부 가 세	453,260,036	445,540,136	감) 7,719,900
	계	4,985,860,400	4,900,941,500	감)84,918,900

3) 3차 1회                                          (단위 : 원)

구 분		3 차 분			비 고
		당 초	변 경	증 ․ 감
총 공사비		744,647,500	744,647,500	-
도급액	공급가액	676,952,272	676,952,272	-
	부 가 세	67,695,228	67,695,228	-
	계	744,647,500	744,647,500	-

4) 계약기간 변경없음.

구분	계 약 기 간		비고
	당초	변경
총차	2012.12.27. ~ 2015.2.28	변경없음
2차	2013. 3.29 ~ 2015.2.28	변경없음
3차	2013. 6.13 ~ 2015.2.28	변경없음

바. 예산과목 : 도시안전실 하천관리과, 치수및하천관리, 수방대책사업, 송정사근빗물펌프장시설용량증대, 시설비및부대비, 시설비

붙임 : 1) 설계변경 시행방침 1부.

2) 설계변경 내역서 1부.

3) 합의각서 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	조양연		방재시설과장	이도헌		방재시설부장	02/13 임춘근
협조자	계약1팀장	김점선
시행	방재시설부-2059	(		)	접수		(		)
우	100-777	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 빌딩 12층	/
전화	0237082557	/전송	0237082599	/	choaral@seoul.go.kr	/	대시민공개