투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	관급자재(전기히트펌프) 납품기한 연기의뢰

우리부에서 시행중인 『서울 거리예술센터 조성 기계공사』에 소요되는 관급자재 납품기한을 아래와 같이 연기 요청하오니 조치하여 주시길 바랍니다.

1. 공 사 명 : 서울 거리예술센터 조성 기계공사

2. 계약현황 및 납품기한 연기요청 내용

가) 건명 : 서울거리예술창작센터 조성공사 전기히트펌프 구매

계약번호	계약금액	계약업체	계약일자	납품기한
				당 초	변 경
00148092603	금6,001,930원	엘지전자주식회사	2014.10.16.	′15.02.23	‘15.03.13

3. 연기사유 : 설치시기 미도래

4. 계약금액 및 수량 : 변경없음

5. 지체상금 부과여부 : 미부과

따로붙임 : 1. 관급자재 납품기한 연기 보고서 1부.

2. 합의각서 1부.  끝

	설비부장
주무관	김도형		환경설비과장	代이호기		설비부장	02/13 박기형
협조자
시행	설비부-2007	(		)	접수		(		)
우	100-777	서울특별시 중구 청계천로 8 서울특별시 도시기반시설본부 설비부(프리미어플레이스빌딩 15층)	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02)3708-8619	/전송	02)3708-8659	/	dokebi@seoul.go.kr	/	대시민공개