문서번호	설비부-1988
결재일자	2015.2.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		환경설비과장	설비부장
김도형		代이호기	02/13 박기형
협 조

-서울 거리예술센터 조성 기계공사-

관급자재(전기히트펌프) 납품기한 연기 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.  2.

서울특별시 도시기반시설본부

(설비부)

「서울 거리예술센터 조성 기계공사」

관급자재(전기히트펌프) 납품기한 연기검토 보고

우리 본부에서 시행중인 『서울 거리예술센터 조성 기계공사』에 소요되는 관급자재인 전기히트펌프에 대하여 선행 공정(건축) 지연으로 당초 납품기한을 다음과 같이 연기조치하여 사업추진에 만전을 기하고자 보고 드림.

Ⅰ		공 사 개 요

□ 공 사 명 : 서울 거리예술센터 조성 기계공사

□ 공사위치 : 광진구 광장동 17번지 일대(구의 취수장)

□ 공사규모 : 구의 취수장 서울 거리예술센터 문화공간 조성(기계설비공사)

□ 공사기간 : 2014.12.03. ~ 2015.03.20

□ 도 급 비 : 금245,294,800원

□ 시 공 사 : ㈜상록이티씨 외 1개사

Ⅱ		관급자재 계약현황

□ 계약명 : 전기히트펌프 구매설치(서울 거리예술창작센터 조성 기계공사)

품명	단위	수량	계약금액	계약일자	납품기한	계약자	비 고
전기 히트펌프	식	1	금6,001,930원 (조달수수료 포함금액)	′14.10.16	′15.2.23	엘지전자 주식회사	현장설치도

Ⅲ		납품기한 연기내용

□ 납품기한 연기사유

- 선행공정(건축 공사)인 발전기실 설치 지연에 따른  전기히트펌프 설치시기 미도래로 납품기한 연기가 필요한 실정임.

□ 납품기한 연기

계약명 (품명)	납품기한		비 고
	당초	변경
전기히트펌프 구매설치(서울 거리예술창작센터 조성 공사) (전기히트펌프)	′15.02.23.	′15.03.13	증)18일

□ 귀책 소재 : 서울특별시 도시기반시설본부

□ 지체상금 부과여부 : 미 부과

Ⅳ		조 치 계 획

□ 공사현장 건축공정(운영실 천장공사) 진행을 감안하여 당초 조달 구매한 전기히트펌프의 납품기한을 2015.03.13.일까지 연기조치하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

따로붙임 : 합의각서(납품기한 연기)  1부.  끝.