문서번호	토목부-3142
결재일자	2015.2.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
김구		홍숭희	02/13 노우성
협조
	주무관		유근평

사토장 변경 검토보고

【강남순환도시고속도로(8공구) 건설공사】

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 2.

도시기반시설본부

(토목부)

-강남순환도시고속도로(8공구) 건설공사-

사토장 변경 검토보고

당초 선정하여 사용하고 있는 사토장(유니석산) 보다 운반시간이 적게 걸리는 사토장(원우석산)으로 변경 요청이 있어 검토 보고드림

관련근거

❍ 동기강 2015-14호(`15. 1.14.) 사토장 변경 선정 승인 보고

공사개요

❍ 공 사 명 : 강남순환도시고속도로(8공구) 건설공사

❍ 공사규모 : 폭 4~10차로, 연장 7.96km(교량 2개소, 지하차도 4개소)

❍ 공 사 비 : 222,995백만원 (8차: 4,000,000천원)

❍ 공사기간 : 2002. 7. 3. ~ 2018. 7. 31.(8차 `14.10. 1.~`15. 2.28.)

❍ 시 공 사 : 롯데건설(주) 외 1

❍ 감  리  사 : ㈜동명기술공단

감리단 보고내용

❍ 사토장 변경 신청 현황

구 분	설계	당 초	변 경	비 고
위치	인천시 서구 백석동	광주시 퇴촌면 도수리 산39-1	화성시 무송동 6-2
사토장	토사	유니석산	원우석산
거리(km)	46.61km	38.30	38.53

❍ 당초 선정한 사토장(유니석산)보다 운반거리는 늘었지만, 운반시간이 줄어 예산을 절감할 수 있는 사토장으로 변경 선정은 적정한 것으로 판단되며 적용단가는 협의율(79.855%) 적용.

❍ 사토장 선정 현황

(단위 : 천원)

구 분		설 계 (수도권매립지)	당 초 (유니석산)	변 경 (원우석산)	비 고
운반거리(km)		46.61	38.30	38.53
왕복시간(분)		131.59	106.95	100.88
인･허가(신고)		신고필	신고필	신고필
단가 (㎥/원)	토사	12,005	11,876	10,296	감)1,580
	리핑암	14,844	14,545	12,826	감)1,719

❍ 공사비 증･감 현황

(단위 : 천원)

구 분		수량(㎥)	당 초	변 경	증 ･ 감	비 고
사토	토사	108,173	1,298,617	1,113,749	-184,868
	리핑암	60,238	894,173	772,613	-121,560
소 계		168,411	2,192,790	1,886,362	-306,428
제경비			242,810	208,183	-34,627
물가변동			168,945	-	-168,945
부가세			260,455	209,455	-51,000
총 공 사 비			2,865,000	2,304,000	-561,000

조치계획

❍ 원활한 공사추진을 위해 사토장 변경은 바람직한 것으로 판단되며 적용단가는 협의율(79.855%)에 따라 산정한 단가를 적용하여 도급사에 사토장 변경 승인하고 추후 설계에 반영하여 정산하고자 함.

❍ 또한 책임감리원으로 하여금 토석정보공유시스템을 수시 조회토록 하여 최단거리 사토장에 반출, 예산을 절감할 수 있도록 업무지시코자 함.

붙 임 : 감리검토의견서 1부.  끝.