문서번호	기술심사담당관-2981
결재일자	2015.2.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
실무사무관		설비심사팀장	기술심사담당관
여인웅		임철수	02/13 최진선
협조
	주무관		임태수

제39차 건설기술심의(용역발주심의) 사전검토 보고

심 의 안 건	제39차 서울시 집단에너지 확대 기본계획 수립용역 (용역발주심의)
심 의 일 자	서 면 심 의

2015.  2.

기술심사담당관

(설비심사팀)

제39차 건설기술심의 사전검토 보고

1. 심의내용

안 건 명	제39차 서울시 집단에너지 확대 기본계획 수립용역 (용역발주심의)	요청부서	SH공사 집단에너지사업단
심의방법	서 면 심 의	용 역 비	743,644천원
개 요	○ 서울시 11개구 집단에너지 확대방안 - 동북권역 6개구(기존 노원, 도봉, 중랑 → 신규 강북, 성북, 동대문) - 서남권역 5개구(기존 양천, 강서, 구로 → 신규 영등포, 금천) ○ 집단에너지사업 중장기 최적 운영방안
내부검토	○ 설비심사팀 : 여인웅

2. 심의위원

연번	소 속	직 위	성 명	분 야	비 고
1	기술심사담당관	담 당 관	최 진 선	총 괄
2	인하대학교	교 수	김 광 용	플 랜 트
3	삼인이에스	대표이사	조 춘 식	플 랜 트
4	해외건설협회	실 장	김 석 화	플 랜 트
5	서울연구원	선임연구원	조 항 문	계획·운영
6	한국에너지기술연구원	실 장	임 용 훈	계획·운영
7	SH공사집단에너지사업단 동부지사	지 사 장	김 양 동	유지관리

3. 검토의견 : 붙임

붙임 : 건설기술심의 검토의견서(기술심사담당관) 1부.

추진배경

❍ 에너지 위기와 기후변화에 선도적 대응을 위한「원전하나 줄이기」사업의 일환으로 시행하는 집단에너지 6만호 확대 계획에 따라,

❍ 서울시에서 운영중인 집단에너지 사업장별 열수요 분석을 통한 열수요 확대, 타사업자와의 열연계 방안, 공급수요를 반영한 열원 최적화 방안 등 집단에너지 공급 확대를 위한 기본계획 수립

공급확대 주요내용

❍ 대상지역 : 서울시 전역

- 기존 공급지역 (목동, 강서/마곡, 노원)

- 확대 공급지역 (영등포, 금천, 구로, 강북, 성북, 동대문)

- 연계 열수송관을 포함한 서울시 전역

❍ 활용 열원

기존 목동․노원지역 열원, 마곡지구 등 신규열원, 타사업자 연계가능 열원시설 및 서울시 전역 활용 가능한 신재생에너지(미활용에너지 및

폐기물 자원 포함)

❍ 장기 공급계획 범위  : ~ 2035년

과업내용

❍ 사업대상지역 일반현황 조사

❍ 집단에너지사업 관련 법규 및 정책 검토

❍ 서울시 집단에너지 운영현황 분석

❍ 집단에너지 수요처 조사 및 수요개발계획

❍ 열공급시설 최적화 방안 수립

❍ 집단에너지사업 중장기 최적 운영방안

❍ 투자비용 분석, 경제성 및 재무분석, 정책적 분석, 종항평가 등

추진경위

❍ ‘14. 8.30 : 시장방침 제 231호(「에너지살림도시,서울」종합계획)

❍ ‘15. 1.20 : 집단에너지 확대 기본계획수립 용역 계획보고

❍ ‘15. 2. 3 : 기술용역 타당성 심사

향후계획

❍ 2015. 2 : 설계용역 발주 및 계약

❍ 2015. 3 : 용역 착수

❍ 2016. 3 : 용역 준공

주요 검토의견

:  <기술심사담당관>

❍ 해당지역의 예정노선의 지형, 지물, 각종 시설물, 토지이용상황 등의 정확한 현황을 파악할 수 있도록 현지조사 및 답사 항목을 명시할 것.

❍ 해당 관련계획 및 정책방향과의 일치성, 환경성, 재원조달가능성, 지역경제 활성화 등에 대한 특성을 고려한 정책적 분석을 하도록 내용을 추가할 것.

❍ 동두천 드림파워 열거래사업 타당성 검토 용역과 업무를 공유하기 위해 주기적으로 검토회의를 추진도록 내용을 추가할 것.

❍ 국내외 유사사례 조사, 분석하여 활용방안 등을 검토하도록 내용을 추가할 것.