	동부도로사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경(정산)시행［(관내포장도로 불량맨홀정비공사(연간단가)］

우리사업소에서 시행중인 『관내포장도로 불량맨홀정비공사(연간단가)』에 대하여 아래와 같이 설계변경(정산) 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 관내포장도로 불량맨홀정비공사(연간단가)

나. 공사기간 : 2014. 3. 21 ~ 2015. 02. 28.

다. 공사개요

o  불량맨홀정비 872개소(주간 418개소, 야간 454개소)

라. 도 급 비 : 791,129,000원

마. 도 급 자 : 태평림건설(주) 대표 이동균

바. 설계변경내역

o 정비수량(당초 872개소, 변경 918개소)

o 도급비

(단위:원)

구 분		당 초	변 경	비 고(증·감)
총 공사비		800,000,000	800,000,000	-
도급비	공 급 가 액	719,208,182	718,899,091	감) 309,091
	부가가치세	71,920,818	71,889,909	감) 30,909
	계	791,129,000	790,789,000	감) 340,000
폐기물 처리비		8,871,000	9,211,000	증) 340,000

사. 변경 사유 : 불량맨홀 정비 공종별 시공물량 증ㆍ감 발생

아. 예산 과목

o 도로시설물관리, 도로 및 도로부속물관리(도시개발), 노후포장도로정비공사, 시설비 및 부대비(시설비)

따로붙임 : 1. 설계변경 사유서 1부.

2. 설계변경 검토보고서 1부.

3. 설계변경 내역서 1부.   끝.

주무관	송광석		도로보수과장	김환겸		동부도로사업소장	02/13 송상영
협조자	주무관	박일연		주무관	이중연		계약1팀장	김점선
시행	도로보수과-984	(		)	접수		(		)
우	135-280	서울 강남구 남부순환로 3142-33(대치동 2번지)	/	http://www.seoul.go.kr
전화		/전송		/		/	대시민공개