내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	준공기한 연기의뢰(안양천변 임시주차장 설치 기본설계 용역)

1. 체육진흥과-1876호(2015.02.12.)와 관련입니다.

2. 우리시에서 수행중인 「안양천변 임시주차장 설치 기본설계 용역」에 대하여 다음과 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역명 : 안양천변 임시주차장 설치 기본설계 용역

나. 계약자 : 주식회사 천일, 대표이사 김석환

다. 준공기한 연기내역

- 당초 : 2015. 02. 28.

- 변경 : 2015. 04. 30.

라. 귀책사유 : 서울특별시

붙  임 : 1. 준공기한 연기의뢰서 1부.

2. 준공기한 연기 보고 1부.

3. 과업기간 연기요청 공문(주.천일) 1부.

4. 합의각서 1부. 끝.

	체육진흥과장
주무관	김창기		체육시설팀장	양성태		체육진흥과장	02/13 신대현
협조자
시행	체육진흥과-1898	(		)	접수		(		)
우			/
전화	2133-2693	/전송	2133-1064	/		/	대시민공개