문서번호	토목부-3055
결재일자	2015.2.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
박웅교		홍숭희	02/13 노우성
협조
	주무관		시희식

준공기한 연기 검토보고

【강남순환도시고속도로(4공구) 시점부 지하차도 보완설계 건설사업관리용역】

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 2.

도시기반시설본부

(토 목 부)

준공기한 연기 검토보고

【강남순환도시고속도로(4공구) 시점부 지하차도 보완설계 건설사업관리용역】

『강남순환도시고속도로(4공구) 시점부 지하차도 보완설계 건설사업관리용역』의 과업기간 연장 요청에 대한 검토 보고임.

1		용역개요

○ 용역명 : 강남순환도시고속도로(4공구) 시점부 지하차도 보완설계 건설사업관리용역

○ 위  치 : 광명시 소하동 시흥대교 서측 시흥대교 서측(광명시 소하동 31-5호 주변)

○ 사업내용 : 강남순환 4공구 시점부 지하차도 보완설계 건설사업관리용역

- 지하차도 폭 4차로, 연장650m

․Box(4차로, 연장 315m), U-Type(4차로, 연장 335m)

○ 용역기간 : 2014. 8.19. ~ 2015. 2.28.

○ 계약금액 : 95,275,000원

○ 계 약 자 : ㈜제일엔지니어링종합건축사사무소 대표 최태희

2		관련근거

○ 2015. 2.11. : 과업기간 연장 요청(제일 제 15 - 265호)

3		준공기한 연기

○ 당  초 : ‘14. 8.19. ~ ’15. 2.28.

○ 변  경 : ‘14. 8.19. ~ ’15. 8.30.

○ 지체상금 : 미부과

4		연기사유

○ 건설사업관리용역 대상인 “ 강남순환도시고속도로(4공구) 시점부 지하차도 보완설계” 용역의 과업기간이 변경(당초 ‘14. 8. 1. ~ ’15. 1.30. → 변경 ‘14. 8. 1 ~ ’15. 7.30.)됨에 따른 건설사업관리용역기간 연장

5		조치의견

○ 부실설계를 방지하고 내실있는 설계를 위해 건설사업관리용역 준공기한을 연기하여 보완설계용역 수행에 만전을 기하고자 함.

붙  임 : 연기요청 공문 및 관련 서류 각  1부.  끝.