문서번호	물재생과-990
결재일자	2015.2.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생과장	중랑물재생센터소장
차성민		강병수	02/13 김동기
협조
	주무관		최승룡

「준설토 운반 및 처리용역(연간단가)」

설계변경 보고(최종)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 2.

중랑물재생센터

(물재생과)

우리 센터에서 시행중인『2014년 중랑물재생센터 차집관거 준설토 운반 및 처리용역(연간단가계약)』이 완료됨에 따라 설계변경 정산처리코자 함.

「준설토 운반 및 처리용역(연간단가)」

설계변경 보고(최종)

1		공사개요

○ 용 역 명 : 2014년 중랑물재생센터 차집관거 준설토 운반 및 처리용역(연간단가)

○ 용역개요 : 운반물량 3,500㎥, 처리물량 5,355ton

○ 용역기간 : 2014. 06. 20 ～ 2015. 02. 27

○ 용 역 비 : 170,874,000원

○ 시 공 사 : (주)이오개발 대표 이은숙

2		보고내용

○ 설계변경 사유 : 계약물량 감소

○ 주요공종 변경내용

공 종	규 격	단위	수 량
			당초	변경	증,감
차집관거 준설토운반 (청계3구역 야적장)	L=43.05Km 24톤덤프	㎥	3,500	3,391	감)109
가설휀스	1.45*1.8, 1년미만	개	50	0	감)50
공사안내간판	0.9m*1.8m	개	2	0	감)2

○ 설계변경 금액                                              (단위 : 원)

구 분		당초 계약금액	변경 계약금액	증 ․ 감
총공사비		170,874,000	164,965,700	감)5,908,300
도급비	공급가액	155,340,000	149,968,819	감)5,371,818
	부가가치세	15,534,000	14,996,881	감)537,119
	계	170,874,000	164,965,700	감)5,908,300
이 전 비		-	-	-

3		조치내용

○ 위와 같이 설계변경 정산처리코자 함.

붙  임  설계변경 내역서 1부. 끝