문서번호	시설과-995
결재일자	2015.2.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		추진반장
김용주		02/13 유인행
협조

곰사 뒷방사장 보수공사

정산설계변경 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 2

서  울  대  공  원

(기반시설안전추진반)

곰사 뒷방사장 보수공사

정산설계변경 보고

곰사 뒷방사장 보수공사에 대하여 퇴직공제부금 등 제경비를 정산하고자 함

Ⅰ		공 사 개 요

□ 공 사 명 : 곰사 뒷방사장 보수공사

□ 공사기간 : 2014. 9. 11 ~ 2015. 2. 12

□ 계 약 자 : ㈜미래이앤씨 대표 이용호

□ 공사금액 : 일금435,628,000원정

□ 주요공사내용

○ 외부 오수배수로 정비 78m

○ 옥상방수 540.8㎡

○ 내·외벽 도장 2,065㎡

○ 외부방사장 바닥정비

○ 철재우리 증축 42.3㎡

○ 외부 철재우리 방청도장

○ 내·외부 방사장 출입문 잠금장치 보완 등

Ⅱ		공사비 변경

□ 변경금액

(단위 : 원)

변 경 전	변 경 후	비 고
435,628,000	434,277,000	감1,351,000

Ⅲ		변경 검토

○ 건설근로자 퇴직공제부금

- 설계금액 : 3,296,220원

- 납입금액 : 2,289,000원

○ 검토의견

- 건설근로자 퇴직공제부금 차액 및 일반관리비 등 제경비를 포함하여 정산 하고자 함

Ⅳ		조 치 의 견

□ 본 공사건에 대하여는 상기 검토의견과 같이 정산설계변경을 시행 하고자 합니다.

붙임 : 변경설계서 1부. 끝