문서번호	토목부-3189
결재일자	2015.2.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량건설과장	토목부장
이상근		이동훈	02/16 노우성
협조

건설폐기물 처리용역 준공기한 연기 검토보고

『서남권 돔야구장주변 보행자전용도로(보행광장) 설치 및 고척교 확장공사』

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 2.

도시기반시설본부

(토 목 부)

건설폐기물 처리용역 준공기한 연기 검토보고

「서남권 돔야구장 주변 보행자전용도로(보행광장) 설치및 고척교 확장공사」

「서남권 돔야구장 주변 보행자전용도로(보행광장)설치 및 고척교 확장공사」의 준공기한이 ‘2015. 6.30.으로 연기되었는바, 본 공사에 필요한 건설폐기물 처리용역에 대한 준공기한을 연기하고자 함.

1		관련근거

❍ 서남권(감) 2015-045(‘15. 2.13.) : 건설폐기물처리용역 계약기간 연장 요청

2		공사개요

❍ 용 역 명 : 『서남권 돔야구장 주변 보행자전용도로(보행광장) 설치 및 고척교 확장공사 건설폐기물처리용역』

❍ 용역규모 : 폐기물 운반 및 처리

- 폐콘크리트 1,350㎥, 폐아스콘 778㎥

❍ 용역기간 : 2013. 5.15. ~ 2015. 2.28.

❍ 용 역 비 : 97,900천원

❍ 용 역 사 : ㈜동성외 1개사

3		보고 내용

❍ 준공기간 연기사유

-  본 공사가  교통규제 및 안양천 하천점용, 우기철 수방기간 공사중지등으로 준공기한이 당초 ‘15. 2.28.에서 ’15. 6.30.까지 변경되었는바, 본 공사에 수반되는 건설페기물 처리용역을 공사기간에 맞추어 준공기한 연기가 필요함.

❍ 준공기한 연기 현황

【단위 : 천원】

구 분	설 계 변 경 현 황			공 사 기 간		비고
	당 초	변 경	증·감	당 초	변 경
총 차	97,900	97,900	-	‘13. 5.15. ~’15. 2.28.	‘13. 5.15. ~’15. 6.30.

※ 내역변경 없음.

4		조치의견

❍ 본 공사의 진척율이 70%미만으로 공사 진행에 따른 폐기물 반출이 계속 이뤄지는바, 건설폐기물 처리용역의 준공기한을 본 공사의 준공기한에 맞추어 ‘15. 6.30.까지 연기하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

붙  임  1. 감리 검토의견서 1부.

2. 계약내역서 1부.

3. 준공기한 연기의뢰서 1부.

4. 합의각서 1부.  끝.